문서번호	시설관리과-10091
결재일자	2019.4.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설관리과장
강정구	김대용	04/29 천성훈

설계변경(최종) 심의 결과 보고(2018년 2차 중랑,동대문구 관내 상수도 시설물설치 및 보수공사)

2019. 4.

동부수도사업소

시설관리과

설계변경(최종) 심의 결과 보고

우리 사업소에서 시행하는「2018년 2차 중랑,동대문구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사」에 대한 설계변경(최종) 심의 결과를 보고합니다.

Ⅰ		공 사 개 요

❍ 공 사 명: 2018년 2차 중랑, 동대문구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사

❍ 도 급 자: 성신진흥산업개발(주) 대표 김보민

❍ 공사규모

- 당초: 밸브 및 실 정비 81개소, 기어박스 점검 및 정비 등 3개소,

소화전보수 3개소.

- 변경: 밸브 및 실 정비 32개소, 기어박스 정비 1개소, 소화전보수

22개소, 환경정비 5개소

❍ 공사기간 : 2018.12.20. ~ 2019. 4.30.

❍ 공사금액 변경 내역

구 분	금 액(원)		증 감(원)	비고
	당 초	변 경
총공사비	***********	***********	***********	물량증감 및 신규공종 발생
도 급 비	***********	***********	***********
관급자재비	***********	***********	*

Ⅱ		설계 변경 사유 및 목록

❍ 공사시행에 따른 물량 증감

- 콘크리트포장깨기[굴삭기(타이어) 0.18㎥(브)]외 225개 공종

❍ 공사시행에 따른 신규공종 발생: 설계금액에 ************을 적용

- 신규공종: 유로폼(보통구조)외 18개 공종

Ⅲ		심 의 개 최

❍ 심의일시: 2019년 4월 29일(월) 10:00~

❍ 심의장소: 시설관리과 사무실(3층)

❍ 심의위원: 위원장: 시설관리과장

위  원: 시설6급 박종일, 황대룡, 이훈재, 유광창, 김대용

Ⅳ		심 의 결 과

❍ 신규공종 산출 적정성 여부: 적정

❍ 물량 변동 및 단가 적용 등의 적정성 여부: 적정

❍ 관련규정 및 적법성 여부: 적정

❍ 설계변경 세부내용 및 사유 등 타당성 여부: 적정

Ⅴ		처 리 의 견

❍ 설계변경 심의 결과 신규공종 산출, 물량 변경 및 단가 산정 등이 적합하므로 설계변경 계약 시행코자 합니다.

붙임: 1. 설계변경 심의 의견서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 사유서 1부.  끝.