투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	기성검사 결과 제출(노들섬특화공간 조성사업 기계설비공사 2차3회 및 3차1회)

1. 대외1-감리-19-442호(2019.04.26.)호와 관련입니다.

2. ‘노들섬 특화공간 조성사업 기계설비공사(2차, 3차)’ 와 관련, 책임건설사업관리기술자      로부터 검토 제출된 기성검사 결과를 아래와 같이 제출하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공  사  명 : 노들섬 특화공간 조성사업 기계설비공사(2차, 3차)

나. 계  약  자 : 중원엔지니어링㈜

다. 공 사 기 간 : 2017.12.08.~2019.08.31.(총차, 계약일자 : 2017.11.29.)

2018.05.28.~2019.05.31.(2차)

2019.02.22.~2019.08.31.(3차)

라. 계 약 금 액 : 금1,951,474,000원(총차)

금1,283,452,830원(2차)

금623,076,700원(3차)

마. 기성검사 내역

계 약 금 액		기성금액(원)
		전회기성	%	금회기성	%	누계 기성	%	잔여금액	%
2차 3회	1,283,452,830	667,800,000	52.03	408,965,000	31.87	1,076,765,000	83.90	206,687,830	16.10
3차 1회	623,076,700	0	0	267,484,000	42.93	267,484,000	42.93	355,592,700	57.07

※ 건설산업지식정보시스템(kiscon) 확인사항 : 해당 없음

따로 붙임 : 기성검사 서류(검사조서, 내역서 및 사진 등) 각 1부.  끝.

	설비부장
주무관	박경철		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	04/29 임정규
협조자
시행	설비부-6210	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8647	/전송	3708-8659	/	pkc6896@seoul.go.kr	/	부분공개(5 6)