문서번호	설비부-2130
결재일자	2018.2.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박경철		임병국	전결 02/20 권오식
협조

‘서울바이오허브 조성공사(2단계)’

T.A.B 기술용역 시행계획 검토보고

2018. 02.

도시기반시설본부

(설비부)

‘서울바이오허브 조성공사(2단계)’

T.A.B 기술용역 시행계획 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는 ‘서울바이오허브 조성공사(2단계)’의 T.A.B 기술용역 시행계획을 검토 보고 드림

1		공 사 개 요

공 사 명 : 서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)

규모 및 용도 :

- 신관동(대수선) 지하1층/지상5층, 연면적 3,216㎡, 연구시설

- 별관동(증  축) 지하2층/지상4층, 연면적 3,112㎡,    〃

공사기간 : 2017.09.29.~2019.04.30.

공 사 비  : 2,955백만 원(도급 1,120, 관급 1,813, 이설비 등 22)

2		추 진 경 과

2015.04. : 서울바이오허브 클러스터 조성 발표(경제정책과)

2017.08.  : 공사 준공(1단계)

2017.09. : 설계 및 계약심사 완료(2단계)

2017.09. : 도급공사(2단계) 계약 및 착공

3		용역 발주 내용

용 역 명 : 서울바이오허브 조성공사(2단계) TAB 기술용역

용 역 비                                       (단위 : 천원)

품 명	계	직 접 비	제 경 비	기 술 료	손해배상 보험료	부 가 세	비고
용 역 비	******	*****	*****	*****	**	*****

용역 규모 및 내용

- 규   모 : 신관동(대수선) 지하1층/지상5층, 연면적 3,216㎡

별관동(증축)   지하2층/지상4층, 연면적 3,112㎡

- 용역내용 : 공기조화설비 시스템검토, 소음측정, 시험·조정·점검 및 평가 등

용역 기간 : 착수일로부터 ～ 2019. 04. 30.

4		계 약 방 법 등

계약방법 : 수의계약(추정가격 1천5백만 원 이하)

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 제5호

수의계약 사유

- 본 용역은 추정가격이 1천5백만 원 이하의 소액으로 ‘서울바이오허브          조성 공사(2단계)’ 중 기계설비 시스템에 대하여 시험․조정․평가 하여           기계설비의 성능과 품질 확보를 위해, T.A.B 용역을 다수 실시한 경험이           풍부한 업체하고 공기조화설비 시험․조정․평가수행 자격확인증을 받은           업체와 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 의거 소액  수의           계약을  체결하고자 함.

수의계약 대상업체

- ************************************

- ****************************************************************************************************************************************

5		향 후 계 획

2018.02. : TAB 기술용역 발주

2018.03. : TAB 용역계약 및 착수

2019.04. : TAB 용역준공.  끝.