투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	폐기물 처리용역 설계변경 계약 의뢰(초안산 보행교량, 전체4회)

우리 본부에서 시행중인 『중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사』에 대해 아래와 같이 설계변경(전체 4회) 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 건설폐기물 처리용역

나. 도 급 비 : 25,130천원

다. 용역기간 : ‘16.09.30. ∼ ’19.04.30.

라. 도 급 자 : ㈜방태

마. 예산과목

- 일반회계, 치수 및 하천관리, 하천 복원 및 정비, 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치, 시설비 및 부대비, 시설비

바. 설계변경(전체 4회)                                                  (단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증. △감
전체 (43회)	도 급 액	25,130	24,180	감)950
	용역기간	‘16.09.30. ~ ‘19.04.30.	‘16.09.30.~ ‘19.04.30.	-

사. 설계변경 사유

- 주변 도로 구조개선 공사 및 주차장 개선공사 완료 후 폐기물 실정산

붙임 : 1. 설계변경 방침서 1부.

2. 변경 내역서 각 1부.  끝.

	토목부장
주무관	권해엽		교량건설과장	장종환		토목부장	04/29 김영수
협조자	주무관	노순재		주무관	황윤기
시행	토목부-7470	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2578	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5)