문서번호	시설관리과-10248
결재일자	2019.4.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
홍민표		김대용	04/30 천성훈
협조

급수공사 연기보고서

(개량 38, 40, 신설70)

2019. 04.

동부수도사업소

시설관리과

명에 의거 중랑구 관내 지역담당 업무 수행 중 공사기간 연기 사유가 발생하여 아래와 같이 보고 드립니다.

□ 현  황

❍ 공 사 명: 2018년 망우본동외 8개동 상수도공사-2차

❍ 도 급 자: ************

□ 보고내용

❍ 급수공사 작업지시 사항 중 아래와 같은 사항으로 부득이 공사기한 연기가 필요한 실정임.

작업지시 번 호	공 사 위 치	연 기 사 유	공 사 기 간
			당 초	변 경
개량38	면목동 147-24	현장 확인결과 단수계획 및 교통소통대책 수립 등에 따라 연기	2019. 3.14.~ 2019. 4.30.	2019. 3.14.~ 2019. 6.30.
개량40	면목동 527-81		2019. 3.15.~ 2019. 4.30.	2019. 3.15.~ 2019. 6.30.
신설70	면목동 174-63	공사현장 자재적치 및 건축공사 공정상 수요가 수요가 원에 따라 연기	2019. 4.19.~ 2019. 4.30.	2019. 4.19.~ 2019. 5.15.

□ 처리의견

❍ 원활하고 안전한 급수공사 시행을 위하여 공사기한을 연기하여 공사장 안전 관리 및 민원 처리에 만전을 기하고자 합니다.

붙임  공사기간 연기 요청서 1부.  끝.