	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	마곡119안전센터 신축공사 진척사항 보고(4월)

1. 소방행정과-12009(2018.12.04.)호『마곡119안전센터 신축공사 발주계획

보고』와 관련됩니다.

2. 마곡119안전센터 신축 공사와 관련 건축공사 진척 사항을 다음과 같이 보고

합니다.

가. 건    명: 마곡119안전센터 신축 건축공사

나. 시 공 사: 제이엠건설(주)

다. 공정기간: 2019. 4. 1. ~ 4. 30.

라. 공 정 률: 25%

마. 진척사항(주요공정)

○ 기초 콘크리트 타설

○ 1층, 2층 바닥 철근배근 및 거푸집 설치

○ 1층, 2층 바닥 콘크리트 타설

바. 공사일보 및 추진 공정표: 붙임

붙임 1. 4월 공사일보 1부.

2. 4월 공정표 1부.  끝.

담당자	김종돈		장비회계팀장	김동욱		소방행정과장	원병연		소방서장	05/02 김두일
협조자
시행	소방행정과-4897	(		)	접수		(		)
우	07550	강서구 양천로 550(등촌동 강서소방서) 2층 소방행정과	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02)3663-5119	/전송	02)3663-1130	/	201105076@seoul.go.kr	/	부분공개(5)