문서번호	시설보수과-3544
결재일자	2019.5.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설보수과장
이택호	05/02 오재섭

강구조물 안전점검 결과 조치 계획

(미아리구름다리)

2019. 5.

북부도로사업소

( 시 설 보 수 과 )

강구조물 안전점검 결과 조치 계획

(미아리구름다리)

교량안전과에서 실시한 강구조물 안전점검(2019.01.10. 실시) 결과 지적사항에 대한 조치계획 보고임.

□ 관련근거

○ 미아리구름다리 강구조시설물(용접분야) 안전점검 결과 알림(교량안전과-721,2019.01.15.)

□ 시설물 현황

○ 시설물명 : 미아리구름다리

구분	규모(m)		위 치	설계하중	교량형식	준공년도	비고
	폭	연장
법정외	15.5	46	성북구 돈암1동 51-56	DB-24	STB	'96.06.30

○ 위치도 및 현황사진

길음교 미아리구름다리 A1 A2
A1 A1 A2 [ 강박스 외부사진 ]	[ 강박스 내부사진 ]

□ 점검결과(점검일 : 2019.01.10.)

○ 미아리구름다리 G1열 결함사항

1. A2측 강박스 진입 맨홀 덮개 철판이 무거워 안전사고 발생의 우려가 있으므로 제거 후 가벼운 철판으로 교체 바람(G2열 동일)

2. A1 G1열 상부 Splice부 볼트 등 녹 발생

3. A1 G1열 아치 하현 박스 입구 복부판(WEB) 도장탄화

4. A1 G1열 아치 하현 박스 하부 Splice부 볼트 등 녹 발생 : SP1, SP2

5. A1 G1열 하부 Splice부 볼트 등 녹 발생 : SP3, SP4

6. A1 G1열 하부 Splice부 도장박리 : SP5(점검구 맨홀 부근)

7. A2방향 G1열 아치 하현 박스 하부 Splice부 볼트 등 녹 발생 : SP5, SP6

- SP6구간 하부 전체 볼트 부식 발생

○ 미아리구름다리 G2열 결함사항

8. A1 G2열 신축이음하부 누수흔적 및 흉벽 표면처리제 박리

9. A1 G2열 지점부 하부 녹 발생

10. A1 G2열 D2~D3구간 상부 Splice부 볼트 등 녹 발생

11. A1 G2열 D7~D8구간 상부 Splice부 누수흔적 및 상·하부 볼트 오염 및 녹 발생

12. A2 G2열 신축이음하부 교대 흉벽 콘크리트 탈락

- 탈락된 잔재가 거더단부 및 받침측의 거동을 방해할 수 있으므로 정비 필요

13. A1방향 G2열 아치 하현 박스 Splice부 볼트 등 녹 발생 : 2개소

14. A1방향 G2열 아치 하현 박스 지점부 도장탄화

15. A1방향 G2열 아치 하현 박스 지점부 하부플랜지 녹 발생

16. A2방향 G2열 아치 하현 박스 내부 잔업잔재 등 미제거

17. A2방향 G2열 아치 하현 박스 Splice부 볼트 등 녹 발생

□ 조치계획

○ 구조물 내구성 확보를 위해 강재 부식, 콘크리트 탈락 등에 대하여 2019년 도로시설물 일상유지보수공사 업체에 작업지시하여 조속히 공사 시행하고 시공물량 변동사항 등은 추후 설계변경시 반영하여 조치코자 함.

○ 개략공사비: 9,500천원

- 표면보수 7.2㎡, 강재 내부 도장 64㎡ 등

○ 보수완료 후 조치결과(사진첨부)를 교량안전과에 제출

붙임 : 1. 교량안전과 안전점검 결과 및 사진대지 각 1부.

2. 개략공사비 1부.  끝.