문서번호	시설보수과-3811
결재일자	2019.5.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
강연홍		박병연	05/02 김용제
협조

목동교(신교) 안전점검시 지적사항에 따른

목동교(신교) 조치계획 보고

2019. 5.

강서도로사업소

[시설보수과]

목동교(신교)안전점검시 지적사항관련

목동교(신교) 조치계획 보고

우리 사업소에서 관리중인 목동교(신교)에 대한 서울시(교량안전과) 안전점검시 발생된 지적사항에 대한 조치계획을 보고 드림.

※관련근거 : 본청 교량안전과-7107호(2019.4.19.)

[목동교(신교) 강구조시설물(용접분야) 안전점검 결과 알림]

Ⅰ		점검현황

점검일시 : 2019. 4. 12(금) 14:00 ~

점 검 자 : 강구조교량팀

교량현황 : 목동교(신교)

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
2종	25.6	240	양평동57~목동174	강서도로사업소 (시설보수과)	DB-24	STB	'86.12.31	한보주택(주)	C

주요점검사항 : 강구조물분야(용접포함)

Ⅱ		보 고 내 용

주요 지적사항

1. 강박스내부 고양이 배설물 등 산재되어 있어 청소필요

2. A1 ~ P1 구간 교량하부(외부) 배수관 누수흔적등으로 보수필요

3. P3 신축이음하부 빗물받이 탈락 및 빗물받이 손상으로 보수필요

4. 신축이음하부 누수(흔적)로 인한 교량받침 및 거더단부, 지점부 및 가로보등 부식으로 도장 필요

⇒ 동력공구(SP3등급) 바탕처리보다는 품질확보를 위해 가능한 브라스팅(SP10등급) 바탕처리후 도장을 할수 있는 공법으로 조치 요망

5. 신축이음하부 지점부 수직보강재 단면감소 및 강재소실 발생부 보수 필요

⇒ 금번 정밀안전진단용역시 강재 소실부에 대한 구조검토 시행 요망

6. 거더내부 상부 바닥판 콘크리트 탈락 및 철근노출(누수)부 조치 필요

⇒ G2열 S3시점부근 조속 정비필요(펀칭 우려)

7. 신축이음부 콘크리트 후타재 탈락부 잔재청소 필요

8. 내부 바닥판 표면 보수재(처리재) 박리 다수로 보수 필요

9. 지점부 받침 볼트체결 불량부 보수 필요(G4,G5열)

10. G5열 외측으로 고압전선관이 통과하므로 강박스 외부(복부판) 하면등의 부식 발생여부등 상세조사 필요

⇒ 정밀안전진단 용역시 전기부식 영향검토 요망

11. 기타 강박스 내부구간 부분 부식부에 대한 도장 등 조치 필요

목동교(신교) 보수관련 추진사항

1. 현재 목동교정밀안전진단용역(구교)이 진행중인 상태로 용역사 현장점검 및 자문을 실시함

가. 용 역 사 : 세안안전진단(주)  대표 박기열

나. 검토의견(요약)

- 녹발생 및 부식부에 대하여 ‘18년 점검시보다 심화된 상태는 아닌 것으로 판단되나, 향후 일상유지보수를 통한 보수가 필요함

- 향후 목동교(신교)에 대하여 정밀안전진단을 통해 녹제거후 강재비파괴(강재두께) 시험을 실시하고 건전부와 비교 검토 필요(구조해석등 실시)

- 목동교 신교를 포함하여 용역 진행시 추가비용이 발생됨(약 55,488천원)

※ 첨부 : 목동교(신교) 안전점검 지적사항 검토의견

2. 긴급 보수공사 시행(펀칭 우려구간)

가. 목동교(신교)

- 목동교(신교) G2열 S3구간의 콘크리트 하면 부식부에 대하여 2019년도 보수공사 시행예정이었으나, 현장조사결과 부식 및 펀칭우려가 있어 2019년 일상유지보수(연간단가) 공사를 활용하여 긴급 보수완료함

(일시 : 2019.4.27.일, 규모 2x2m)

공사전	공사중	보수완료

3. 목동교(신교) 구간에 대하여 시공사 합동으로 현장조사 실시함

- 일시 : 2019. 4. 22(월) 14:00 ~

박스내부 점검(G2열 S3구간)	박스내부 점검(G5열 D71구간)

Ⅲ		검토 및 조치계획

목동교(신교) 정밀안전진단 실시 추진

1. 목동교(신교) 정밀안전진단 검토

가. 교량안전과 점검시 목동교(신교) 구간이 노후 및 수직보강재 단면감소등 강재소실부가 발생되어 정밀안전진단 용역을 통한 구조검토가 필요하다는 의견이 통보되었으며,

나. 목동교(신교)는 현재 C등급인 노후교량으로 용역사 현장점검 및 검토결과 정밀안전진단을 통한 구조해석등을 통하여 안전성을 확인후 결과에 따라 보수・보강이 필요하다는 의견을 제시함

다. 현재 목동교(구교)에 대한 정밀안전진단 용역이 진행되고 있어 목동교 전체(구교 및 신교)에 대한 정밀안전진단으로 변경할 경우 개별적으로 시행할 경우에 비하여 비용은 2/5 정도로 감소됨.

2. 목동교(신교) 정밀안전진단관련 조치계획

가. 본청(교량안전과) 및 용역사등 검토의견을 종합할 때 목동교(신교)에 대한 안전성확보를 위해 정밀안전진단 용역을 시행토록하고, 현재 진행중인 목동교(구교)정밀안전진단 용역에 포함하여 용역을 시행함이 타당하다고 사료됨.(강박스구간 전기부식의 영향검토 포함)

※ 정밀안전진단시 추가 소요예산 : 55,488천원(별도발주시 134백만원)

목동교(신교) 도장 등 보수공사 실시 추진

1. 목동교(신교) 도장 등 보수공사 검토 및 조치계획

가. 목동교(신교) 구간에 대한 강재 및 받침부식, 콘크리트 박락 등의 지적사항에 대하여 현장조사결과 도장 및 보강등 보수가 필요한 상태임

나. 교량 박스(외부)구간의 녹발생이 심한 구간에 대하여는 본청 및 용역사의 조치의견과 같이 브라스팅(SP10등급) 바탕처리하여 녹을 완전히 제거후 도장을 실시하여 안전성을 확보함이 타당하다고 사료됨

(전반적으로 도장은 양호한 상태로, 녹발생이 심한 부분에 대하여 부분도장 실시 : 신축이음부 지점으로부터 3M범위)

다. 박스내부 및 죠인트구간 청소, 빗물받이 보수, 볼트체결부 조치, 박스내부 도장, 바닥판콘크리트 탈락(철근노출)등에 대하여 조속한 시일내에 보수가 필요함

라. 향후 수직보강재 단면감소 구간 등은 정밀안전진단 용역에 따라 보수 및 보강작업이 필요함

마. 긴급보수를 요하는 구간은 2019 일상유지보수공사(연간단가)로 작업을 완료하였으며, 위와 같은 지적사항에 사항에 대하여 보수・보강을 실시하여 교량 유지관리에 만전을 기하고자 함

※ 보수・보강시 추가 소요예산 : 210백만원

※ 지적사항별 세부 보수 및 보강계획 : 별첨

목동교(신교) 소요예산 검토

1. 목동교(신교) 정밀안전진단 및 보수보강에 소요되는 예산에 대하여 본청 교량안전과에 요청하고자 하며, 그 결과에 따라 공사의 시급성을 감안하여 용역추가시행 및 시설물 보수보강 등 조치하고자 함

2. 소요예산 : 총 265,488천원

가. 정밀안전진단 소요예산 : 55,488천원

나. 보수공사 관련 소요예산 : 210,000천원

Ⅳ		행 정 사 항

1. 목동교(신교) 구간 지적사항 보수 및 안전성 확보를 위해 본청(교량안전과)에 예산요청

2. 예산확보후 공사의 시급성을 감안하여 2019 일상유지보수공사(연간단가)등을 활용하여 보수 및 보강공사 시행(향후 별도방침)

첨부 : 1) 관련공문 1부.

2) 용역사 검토결과 1부.

3) 지적사항 세부 조치계획 1부.  끝.