＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(2차 최종) 【2018년 수유1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)】

우리사업소에서 시행중인『2018년 수유1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)』건에 대하여 아래와 같이 설계변경(2차 최종)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2018년 수유1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 계약업체 : *************

다. 계약기간  : 2019. 1. 1. ~ 2019. 6. 30.(총 공사 부기기간 : 2018. 4. 19. ~ 2019. 6. 30.)

라. 변경내역

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증·감(원)	비 고
도 급 비	598,512,910	***********	**********
공급가액	544,102,646	***********	**********
부 가 세	54,410,264	**********	*********

마. 설계변경 사유 : 계약물량 증․감 및 신규공종 발생

바. 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 급배수공사비, 신설공사비-33201

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후상수도관-배급수관정비)-41102

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(간선배관 부설공사)-21104

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 지원사업성시설비(보호통보온재등정비)-22203

- 소방용수시설설치개소수, 소방용수시설등의 설치 및 보수, 소방용수시설설치 -401-01

붙 임     1. 설계변경 심사 결과 각 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의서 1부.

4. 제비율 검증 확인서 1부.  끝.

주무관	최형진		주무관	김성호		시설관리과장	변재홍		북부수도사업소장	05/02 박병권
협조자	주무관	황은주		주무관	구명임
시행	시설관리과-8373	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913 (번동)	/
전화	02-3146-3419	/전송	02-3146-3439	/		/	부분공개(6)