문서번호	급수운영과-8111
결재일자	2019.5.2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장		서부수도사업소장
이용민	김승완	이병운		05/02 박영헌
협 조

장기계속단가계약 발주계획

(2019년 서강동외 7개동 상수도공사)

2019. 5.

서부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

장기계속단가계약 발주계획

(2019년 서강동외 7개동 상수도공사)

「2018년 서강동외 7개동 상수도공사」의 당초 계약금액이  2019년 5월중 소진될 것으로 예상되어 원활한 급수공사 민원처리를 위한 「2019년 서강동외 7개동 상수도공사」를 조기발주하여 업무에 만전을 기하기 위하여 발주 계획을 보고 드림

□ 진행중인 공사 현황

○ 공 사 명 : 2018년 서강동외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요 : D=13~300㎜, L=2,079m

○ 계약기간 : 2018. 7. 12. ~ 2019. 6. 30.

○ 계약금액 : *************

○ 계 약 자 : *************

○ 감 리 자 : ********

□ 예산집행 현황 및 발주 사유

○ 예산집행 현황                                     (단위 :원)

구분	계약금액	기집행금액	집행잔액	비고
도급비	***********	***********	**********	85% 집행

○ 연간단가계약 발주 사유

- 최근 신축건물의 급수공사 신청 증가 및 노후관 개량등으로 2019년 5월중 집행잔액 소진이 예상되어 당초 계약기간인 2019년 6월 30일까지 상수도 공사가 불가한 실정임

- 급수공사 등 민원처리 연속성을 위해 「2019년 서강동외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)」 발주 시행

□ 발주계획

○ 공 사 명 : 2019년 서강동외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요 : D=15~300㎜, L=2,160m

○ 공사기간 : 착공일 ~ 2020. 6. 30.

○ 발주금액(예상도급액) : *************              (단위:원)

구분	총공사비	도급비	관급자재비	복구비 및 기타
계	*************	***********	***********	***********

○ 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 급․배수공사비, 신설공사비

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 지원사업성시설비

- 소방용수시설설치개소수, 소방용수시설등의설치및관리, 소방용수시설설치

- 소방용수시설설치개소수, 소방용수시설등의설치및관리, 소방용수시설보수

○ 발주내역서 작성기준

- 2019년 상수도공사 기본 품셈 단가표(3개년 물량평균)

○ 심사요청 : 서울시 본청 계약심사과

□ 계약방법

○ 관련근거 : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제21조(장기계속계약)

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

□ 행정사항

○ 본청(계약심사과)에 설계 심사 요청

○ 본청 계약심사과 설계심사 결과에 따라 공사발주 시행

붙임  1. 설계내역서 1부.

2. 물량산출서 1부.  끝.