투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 변경계약 의뢰

1.「중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 감독 권한대행 등 건설사업  관리용역(2차-1회)」에 대한 변경계약을 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역

나. 용 역 비 : 총차 2,202,534천원(2차 790,500천원)

다. 용역기간 : 총차 2017.06.19. ~ 2019.10.06.

2차 2018.08.01. ~ 2019.05.15.

라. 용역업체 : ㈜천일 대표이사 김창욱 외 3

마. 변경사유 : 건축 및 기계분야 기술자 투입기간 변경에 따른 계약기간 변경

바. 예산과목 : (공기업하수도특별회계) 물순환안전국, 물재생시설과, 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인자산, 시설비및부대비, 감리비, 물재생시설개선, 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치

사. 변경내역

(단위 : 원)

구분		당초	변경	증․감
용역 금액	총괄	2,202,534,000	2,202,534,000	변경없음
	2차	790,500,000	790,500,000	변경없음
용역 기간	총괄	2017. 06. 19. ～ 2019. 10. 06.	2017. 06. 19. ～ 2019. 10. 06.	변경없음
	2차	2018. 08. 01. ～ 2019. 05. 15.	2018. 08. 01. ～ 2019. 06. 03.	증 19일

붙 임 : 1) 방침서 1부.

2) 변경내역서(2차 1회) 1부.

3) 합의각서 1부.  끝.

	방재시설부장
전문관	조양호		환경시설과장	장수철		방재시설부장	05/02 이임섭
협조자	재무예산과장	홍수열
시행	방재시설부-6215	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8784	/전송	02-3708-8756	/	cyh2466@seoul.go.kr	/	부분공개(6)