문서번호	건축부-7303
결재일자	2019.5.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
김찬유		유현수	05/02 임인구
협 조
	주무관			정인호

『서울애니메이션센터 철거공사』 변경계약 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 4.

도시기반시설본부

(건  축  부)

『서울애니메이션센터 철거공사』

변경계약 검토 보고

「서울애니메이션센터 철거공사」관련 설계변경에 따른 변경계약(1회) 검토 보고 드림.

1		공사개요

위    치  : 서울특별시 중구 소파로 130, 126(예장동 8-20외 3필지)

철거규모  : 애니메이션센터 4동, 만화의 집 2동등(지하층제외)

연면적 7,246.07㎡

공사기간  : ‘18.12. 7. ~ ’19. 5. 5.

공 사 비  : *********

시 공 사  : 마도건설환경㈜외1

건설사업관리용역사  : ㈜혜원까치종합건축사사무소

2		추진경위

‘18. 10. 01. : 건설사업관리용역 착수

‘18. 12. 07. : 공사착공

‘19.  4. 16. : 설계변경 자문소위원회 개최

‘19.  4. 29.  : 변경계약 요청 (혜원까치종합건축사사무소  →  건축부)

3		변경계약검토

관련근거 : 혜원까치 2019-170호(2019.04.29.)

계약변경                                                      (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
공사금액	***********	***********	************	내역변경
공사기간	2018.12. 7~ 2019. 5. 5	2018.12. 7~ 2019. 5. 5	변경없음

4		건설사업관리단 검토의견

설계변경에 따른 변경계약 변경은 적정하다고 판단됨.

5		처리의견

건설사업관리단 의견을 검토한 바, 변경계약 타당하므로 변경계약 처리코자 함

붙 임 : 1. ******************** 1부.

2. **************** 1부.  끝.