문서번호	방재시설부-6295
결재일자	2019.5.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
차성민		장수철	05/03 代진재섭
협조
	주무관		최승룡

「응봉유수지 CSOs 저류조 설치공사 기본 및 실시설계 용역」

과업중지 검토 보고

2019. 5.

도시기반시설본부

(방재시설부)

「응봉유수지 CSOs 저류조 설치공사 기본 및 실시설계 용역」

과업중지 검토 보고

응봉유수지 CSOs 저류조 설치공사 기본 및 실시설계 용역과 관련 소규모 지하안전영향평가 종료시까지 과업중지 검토 결과를 보고 드림.

Ⅰ		용 역 개 요

○ 위    치 : 성동구 고산자로 125-98 (응봉유수지 내)

○ 규    모 : 저류조 설치 4,000㎥

○ 용역기간 : 2018. 4.23. ~ 2019. 5.20.

○ 용 역 비 : 262,180천원

○ 용 역 사 : ㈜제일엔지니어링 외 1

Ⅱ		추 진 경 위

○ ’16.  4.26. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ ’18.11.22. : 기본설계 완료

○ ’19.  1.11  : 실시설계 착수보고회

○ ’19.  3.20  : 소규모 지하안전영향평가용역 계약

○ ’19.  5.현재 : 실시설계 및 소규모 지하안전영향평가 용역 진행 중

Ⅲ		보 고 내 용

○ 과업중지 사유

- CSOs 저류조 설치부지가 협소하여 저류조 설치를 위한 굴착 깊이가 약 17m로, 관련규정에 의거 소규모 지하안전영향평가 대상으로(굴착 깊이 10~20m 내 굴착공사를 수반하는 사업)

※ 관련규정 : 지하안전관리에 관한 특별법(제16조) 및 시행령(제17조)

- 지하안전영향평가는 별도발주 사항으로 현재 과업 수행중이며 용역결과는 국토부 심의사항으로 지하안전영향평가 용역 완료 소요 기간이 5개월로 실시 설계 용역기간 부족

○ 과업중지 요청 현황

용역 착수일	용역 준공일	과업기간	과업 중지 요청일	잔여일
2018.4.23	2019.5.20	390일	2019.5.2	18일

Ⅳ		조 치 의 견

○ 지하안전영향평가(별도발주)의 수행 및 국토교통부 심의 등 완료시 까지 과업중지

Ⅴ		향 후 계 획

○ '19.05. : 소규모 지하안전영향평가 국토교통부 심의요청

○ '19.09. : 소규모 지하안전영향평가용역 준공(예정)

○ '19.10. : 공사 발주(예정)

○ '21.12. : 공사 준공(예정)

붙임 : 관련 공문 1부.  끝.