문서번호	시설보수과-3897
결재일자	2019.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		代윤동원	05/07 김용제
협 조

2019년 우기대비 도로시설물 안전점검  시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 5.

2019년 우기대비 도로시설물 안전점검 시행계획

우기 집중호우 등에 따른 안전사고를 예방하고자 우리사업소 관리 일반시도상의 도로시설물에 대하여 외부전문가(시설안전자문단)와 합동으로 2019년 우기대비 안전점검 계획을 수립 시행함으로써 도로시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련 근거

■ 도로시설과-5470(2019.5.3) : 2019년 우기대비 도로시설물 점검 시행

(도로시설과-5435(2019.5.3.) : 우기대비 도로시설물 안전점검 시행계획

■ 점검기간 : 2019. 5.7(화) ~ 5.24(금) 3주간

■ 대상 시설물현황

구 분	계	일반교량	고 가	I.C	터 널	지하차도	복 개	비 고
계	65	22	6	6	5	22	4
1 종	7	-	-	-	4	2	1
2 종	22	7	3	2	1	9
3 종	17	1	1	1	-	11	3
법정외	19	14	2	3	-	-	-

Ⅱ		안전점검 시행계획

■ 점검조 편성

조 별	점 검 조 원
1 조	시설6급 강연홍, 토목운영6급 조정갑, 외부전문가
2 조	시설6급 윤동원, 토목운영6급 조정갑, 외부전문가
3 조	시설7급 김규춘, 시설7급 김승진, 외부전문가

■ 담당자별 시설물 현황

성 명	외 부 전문가	담 당 시 설 물
1조 강연홍 조정갑 18개소 (14+4)	( )	- 안양교(2종․C), 노들길지하차도(3종․B), 여의하류2교(법외․A)
	이두원	- 목동교(2종․C), 화곡고가(법외․B), 선유교(법외․B)
	( )	- 공단IC(2종,B), 신월IC(법외․B), 목동교서측지하차도(3종․B)
	서외택	- 시흥IC(3종․C), 염창IC하부복개(3종․C), 가리봉철도고가(2종․B)
	강병윤	- 작동터널(1종․B), 국회앞지하차도(2종․B), 등촌지하차도(2종․B)
	( )	- 구로지하차도(2종․B), 서울교접속지하차도(3종․B), 성산지하차도(3종․B)
2조 윤동원 조정갑 20개소 (14+6)	박정용	- 궁동터널(1종․B), 광명교(법외․B), 개화교(법외․B)
	( )	- 고척교(2종․B), 행주1교(법외․B), 행주2교(법외․B), 개화램프B교(법외․A)
	성경익	- 생태터널(1종․A), 개봉교(법외․B), 서울교(2종․B), 개봉지하차도(2종․B)
	( )	- 개봉고가(2종․B), 오목교서측지하차도(3종․B), 개화천복개(3종․B),
	최상식	- 범박터널(1종, A), 역곡천교(법외, B), 행주IC(법외․B)
	( )	- 오금지하차도(2종․B), 신정교접속교(법외, B), 오목지하차도(2종․B)
3조 김규춘 김승진 28개소 (14+14)	( )	- 오목교(2종․B), 오금교(2종․B), 오목교동측지하차도(3종․B), 오금교접속지하차도(3종․B)
	( )	- 여의2교(2종․B), 신도림지하차도(2종․B), 구로역지하차도(3종․B)
	최용기	- 도림천복개(좌안)(1종․B), 도림천하류복개(3종․B), 광복교(법외․B)
	강남구	- 개봉철도고가(2종․D), 도림교(법외․B), 오류IC(법외․B), 개화IC(법외․B)
	( )	- 가마산지하차도(2종․B), 가마산고가(법외․B), 여의2지하(법외․B), 여의하류지하(법외․B)
	김병일	- 서부트럭터미널앞지하차도(1종․B), 고척2지하차도(3종․B), 구로1교(법외․B)
	김삼영	- 화곡터널(2종․ B), 공항입구지하차도(2종․B), 개화지하차도(법외․B)
	박훈규	- 외발산지하차도(1종․B), 영등포R-IC(2종․B), 오류철도고가(3종․B)

※ 시설안전자문단 미지정 시설물은 시설물담당자가 점검대상 난이도등을 감안

외부전문가 별도 선정후 합동점검 시행

■ 주요 확인사항

구 분	주요 확인사항
공통사항	- 포장파손, 지반침하, 배수시설 상태 등 우기 최약부분 - 기타 위험시설물 적치 및 시민불편사항 등
도로시설물 (교량, 고가, 입체교차, 터널, 복개, 지하차도)	- 도로시설물별 취약부재 이상여부 근접 확인 - 교량받침 거동, 터널 갱구부사면, 배수불량구간 열화상태
중점점검	- 도로시설물 점검통로(사다리) 및 점검사다리에 대한 안전성 확인 당진고속도로 이동통로 붕괴사고(‘18.5.19)관련 사전점검, 예방

■ 점검결과 조치계획

◎ 점검결과 지적사항 중 경미한 사항(포장파손 및 배수불량 등)은 현장에서 즉시조치 또는 직영반 및 일상유지보수업체를 활용하여 신속히 보수조치

◎ 구조물의 안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 즉시 보고후 관련분야  전문가(시설안전자문위원 등)의 의견을 포함한 조치계획 수립

Ⅲ		행정사항

■ 점검조별 시설안전자문단과 점검일정 협의 확정

■ 시설물별 안전점검보고서 작성 (양식1)

■ 점검실적을 5.28(화)까지 도로시설과로 제출 (양식2)

■ 외부전문가(시설안전자문위원) 점검수당 지급

점검수당 : 200,000원/회 (20회 시행시 4,000,000원)

예산과목 : (도시개발특별회계, 도로시설과) 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물 안전자문단운영, 일반운영비, 사무관리비

붙임 :  1. 점검보고서(양식1)

2. 점검결과 집계표(양식2)

3. 부재별 점검사항.  끝.