문서번호	도로보수과-4220
결재일자	2019.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
김경욱		유태용	05/07 김용제
협조

-2019년 포장도로 긴급복구공사- 작업지시(제3차) 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 5.

강서도로사업소

[도로보수과]

- 2019년 포장도로 긴급 복구공사 -

작업지시(제3차) 계획 보고

우기철 대비 우리 사업소에서 관리하는 시도상 도로소파(예상)지역 및 균열 등이 발생한 구간에 대해서 긴급복구 공사업체에 작업지시하여 보수․정비하고자 함

□ 사업개요

❍ 공 사 명: 2019년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)

❍ 공사규모: 절삭덧씌우기 66a, 소파포장 51a, 긴급출동/대기 1397hr

❍ 공사기간: 2019. 3. 27. ~ 12. 13.

❍ 공 사 비: 2,240백만원(도급비 790, 관급비 858, 이전비 468백만원)

❍ 도 급 자: 향일건설(주) 정윤상

□ 작업지시

❍ 작업세부내역

연번	위치	방향	지시물량			작업방법		작업조건	적용 기준	차로
			폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	인력	기계
1	남부순환로 420 (기아모터스 앞)	신월IC	3.4	23.2	78.9	■		야간	인력	8
2	방화대로 408 (원주추어탕 앞)	방화 터널	4.6	16.5	75.9	■		야간	인력	6
3	방화대로 294 (신방화역 6번출구 앞)	방화 터널	6.4	42.5	272.0		■	야간	5a	8
4	강서로 494 (다래 빌딩 앞)	올림픽 대로	4.1	13.5	55.4	■		야간	인력	6
5	강서로 532 (대아아파트 107동 앞)	올림픽 대로	4.1	15.2	62.3	■		야간	인력	6
6	가마산로 229 (성보빌딩 앞)	고대 병원	6.6	45.2	298.3		■	야간	5a	6
7	가마산로 271 (구로오메뜨시티 앞)	구로 구청	6.6	10.2	67.3	■		야간	인력	6
8	목동서로 20 (열병합발전소 앞)	이대 병원	3.2	18.5	59.2	■		야간	인력	6
9	목동서로 262 (양천구재활용센터 앞)	양천 공원	4.0	15.3	61.2	■		야간	인력	4
10	양평동1가 247 (중흥S클래스 공사장 앞)	오목교	4.1	13.3	54.5	■		야간	인력	6
11	양평동1가 20 (신동아아파트 1동 앞)	양남 사거리	3.5	32.1	112.4		■	야간	5a	6
12	방화대로 34길 13 (서울항공고 앞)	방화 터널	2.9	28.1	81.5	■		야간	인력	6
13	개봉로 70 (한아름앞)	남부 순환로	7.1	60.3	428.1		■	야간	5a	4
14	가마산로 96 (수협은행앞)	구로IC	6.1	14.2	86.6	■		야간	인력	6
15	디지털로 271 (미니스톱 앞)	디지털 오거리	3.4	70.3	239.0		■	야간	5a	6
16	디지털로 288 (벤처공인중개사 앞)	구로1교	3.2	16.4	52.5	■		야간	인력	6
17	남부순환로 380 (양서중학교 앞)	신월IC	6.6	21.3	140.6		■	야간	5a	8
18	강서로 532 (동신아파트 102동 앞)	올림픽 대로	4.0	60.3	241.2		■	야간	5a	6
19	강서로 177 (롯데마트 앞)	화곡 터널	3.2	99.7	319.0		■	야간	5a	6
20	목동서로 186 (성우네트빌 앞)	양천 공원	3.4	79.6	270.6		■	야간	5a	4
21	목동서로 280 (8단지 811동 앞)	양천 구청	3.2	17.6	56.3	■		야간	인력	4
22	당산로 26 (문래역 7번출구 앞)	영등포 구청역	3.4	60.4	205.4		■	야간	5a	6
23	양평로 136 (PARKHOTEL 앞)	양평교	3.4	16.3	55.4	■		야간	인력	4
24	당산로 214 (래미안 앞 마을버스승강장)	당산 중학교	3.1	25.5	79.1	■		야간	인력	6
25	목동서로 280 (목동8단지 803동 앞)	양천 구청	3.3	20.1	66.3	■		야간	인력	4
26	경인로 832 (대성빌딩 앞)	영등포역	3.5	45.2	158.2		■	야간	5a	6
27	당산로 68 (진로아파트 104동 앞)	청과시장 교차로	3.3	17.1	56.4	■		야간	인력	6
28	양천로 75길60 (현대3차 아파트 앞)	양화교	4.1	207.2	849.5		■	야간	10a	4
29	남부순환로 404 (맥도날드 앞)	신월IC	3.3	70.1	231.3		■	야간	5a	8
30	남부순환로 591 (홍두깨손칼국수 앞)	신월IC	3.3	17.3	57.1	■		야간	인력	8
31	남부순환로 (디지털로 11길34 이레빌딩 앞)	시흥IC	6.1	9.2	56.1	■		야간	인력	4
32	디지털로 272 (한신아이티타워 앞)	구로1교	3.3	19.2	63.4	■		야간	인력	6
33	강서로 (화곡터널→까치산역 방향)	까치산역	3.4	40.5	137.7		■	야간	5a	4
34	목동서로 201 (목동7단지 703동 앞)	양천 공원	3.2	17.1	54.7	■		야간	인력	4
35	가마산로 285 (레드부동산 앞)	구로 구청	3.3	80.2	264.7		■	야간	5a	6
36	디지털로 33길11 (에이스테크노타워8차 앞)	디지털 오거리	3.4	70.3	239.0		■	야간	5a	6
37	경인로 430 (고척스카이돔 앞)	고척교	10.1	31.4	317.1		■	야간	5a	6
합 계							1,460	6,004

□ 작업기간 및 소요예산

차수	작업기간	소요예산(원)	비고
3차	2019. 5. 7. ~ 6. 28.	307,190,000	부가세 포함
합계		307,190,000

※시공물량에 따라 추후 정산

□ 조치계획

❍ 위 사항을『2019년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)』업체로 하여금 보수․정비토록 작업지시하고, 실측물량에 의거 추후 설계변경하여 반영 조치하고자 함.

붙 임 1. 작업지시 내역서(3차) 1부.

3. 3차 작업 위치도 및 현황사진 1부.  끝.