문서번호	기반시설과-1277
결재일자	2019.5.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
박지수		라철흠	05/08 전영주
협조
	전문관		석대창

『2019년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)』

작업지시 우선순위 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 5.

한강사업본부

(시설부)

『2019년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)』

작업지시 우선순위 검토보고

“한강공원 진․출입 시설물 전수조사 및 안전점검” 안전점검 및 기타 민원사항 조치를 위한 「2019년 한강공원 진․출입시설 유지보수 공사(연간단가)」 작업지시 우선순위 선정에 대하여 검토 보고 드림

1		관련근거

○ 한강공원 진·출입 시설물 전수조사 및 안전점검 결과보고(기반시설과-933호,2019.4.9.)

2		공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2019. 4. 1. ~ 2019. 11. 30.

○ 계약금액 : 304,068천원

○ 계약상대자 : ㈜민정건설 대표 백승언

○ 공사규모

- 진출입시설 보수 : 데크보수 620㎡, 조류방지망 설치 200㎡, 철재면 재도장 150㎡, 오일스텐재도장 440㎡ 등

- 천사의계단 보수 : 석재판 철거 후 재설치 138㎡, 도막식 방수 138㎡

3		정비 우선순위 검토

○ 검토사항

- 안전사고 취약계층에 대한 위험요소 우선 조치

- 안전사고 발생 가능성 및 이용객의 시설물 이용 빈도

- 기타 지적사항 처리기한 및 민원사항(시민불편 사항 등)

○ 정비 우선순위 선정(안)

구 분		정비내용	수 량	단 위	우선순위	비 고
공원명	시 설 명
여의도	천상의 계단	· 석재판 철거 후 재설치 · 도막방수	132	㎡	1순위	‘19년 안전점검
	물빛광장	· 목재데크 재설치	20	㎡	1순위	정기점검, 민원
		· 석재판 정비	70	㎡
	피아노 물길	· 두겁석 재설치	68	㎡	1순위	정기점검
	여의나루역 3번 출구 앞 맨홀	· 맨홀 이음부 정비 · 보도정비	10	㎡	1순위	다산콜민원
	당산동 샛강 보행육교	· 목재데크 정비	60	㎡	2순위	‘19년 안전점검, 고질민원
		· 너트 교체 및 볼트 고정	244	ea	1순위
		· 볼트캡 설치	122	ea
	여의도 지하차도	· 균열보수(0.3㎜이상)	2	㎡	1순위	‘18년 정밀점검
		· 균열보수(0.3㎜미만)	6	㎡	2순위
		· 신축이음 보수 등	3	㎡	2순위
뚝섬	성수구름다리	· 계단 논슬립 재설치	75	m	1순위	‘19년 안전점검, 다산콜민원
		· 오일스텐 재도장	440	㎡	1순위
	구의동 보도육교	· 방음판 재설치	2	개소	1순위
		· 노후 핸드레일 재설치	24	m	1순위
	올림픽대교북단 교상계단(하류)	· 목재데크 정비	70	㎡	1순위
	낙천정 나들목 승강기	· 석재판 정비	0.6	㎡	2순위
광나루	풍납토성 나들목	· 안전난간 설치	36	m	1순위	시설물 인수인계 지적사항
		· 핸드레일 설치	20	m
		· 사다리 안전 등받이	2	개소
	나루터길 나들목	· 안전난간 설치	52	m	1순위
		· 핸드레일 설치	20	m
		· 사다리 안전 등받이	2	개소
양화	양화대교 남단 승강기	· 균열 및 단면보수	12	㎡	1순위	정기점검
	선유도 경사로	· 목재데크 재설치	120	㎡	2순위	‘19년 안전점검
	선유교 남단 교상계단	· 강재 재도장	110	㎡	3순위	‘19년 안전점검
강서	가양구름다리	· 목재데크 재설치	60	㎡	2순위	‘19년 안전점검
망원	양화대교 북단 교상계단	· 석재판 정비	10	㎡	3순위	‘19년 안전점검
		· 강재 재도장	40	㎡	3순위
	마포대교 북단 경사로(상·하류)	· 조류방지망 설치	240	㎡	2순위
난 지	거울분수	· 석재판 정비	80	㎡	1순위	정기점검
	거울분수 앞 보행육교	· 목재데크 정비	180	㎡	1순위	‘19년 안전점검

※ 추후 민원 또는 정기점검 발생된 정비 대상의 위험발생 요소에 따라 우선순위 및 물량 증·감 조정 가능

4		조치계획

○ 효율적인 예산 집행을 위해 상기 우선순위에 따라 「2019년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)」 계약업체에 작업지시 하고자 하며,

○ 금년 예산 초과 물량은 2020년 예산을 확보하여 정비하고자 함.

붙임 : 한강공원 진·출입 시설물 전수조사 및 안전점검 결과보고 1부.  끝.