문서번호	건축부-7660
결재일자	2019.5.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	건축관리과장	건축부장
남광연	차무흥	05/08 代유현수
협 조

『스페이스살림 조성공사』

2차 공사기간 연장 검토 보고

2019. 5.

도시기반시설본부

(건 축 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『스페이스살림 조성공사』

2차 공사기간 연장 검토 보고

「스페이스살림 조성공사」와 관련하여 건설사업관리자로부터 사업부지내 오염토 발생 등으로 인한 2차수 공사기간 연장 요청이 접수되어 이에 대하여 검토하여 보고함

1		공사개요

공 사 명 : 스페이스살림 조성공사

위    치 : 동작구 대방동 340-3외3필지

규    모 : 지하2/지상7층, 연면적 17,621.33㎡, 교육연구, 근린생활, 노유자시설

*****************************************

***********************************************

*****************************************

시 공 사 : ㈜호반건설, 제이에스타워(주), 신성종합조경(주)

감 리 자 : ㈜희림종합건축사사무소, ㈜토문엔지니어링건축사사무소

현공정률 : 37% (지하층 골조공사 및 흙막이 가시설 공사 진행중)

2		추진경위

‘17. 12. 26 : 공사착공

‘18.  7. 10 : 2차 공사 착수

‘19.  5.  8 : 오염토 발생 등에 따른 공기연장 요청(2차분)

3		공사기간 변경 내용

관련근거

- 동작구청 맑은환경과-39830호(‘18.12.19.): 오염토양의 정화조치 명령

- HTSC 1812-48호(‘18.12.27.): 오염토 정화조치에 따른 공사지연 방지대책 보고

- 호반건설-2019-01231호(2019.05.08.): 2차수 공사기간 변경 요청

공사기간 조정내용

구 분	공 사 기 간			비 고
	변 경 전	변 경 후	증 감
**	**********************	**********************	****
**	***********************	***********************	******

공사기간 연장 사유

*************************************************************************************************************

**********************************************************************************

귀책 사유 : 도시기반시설본부

지연배상금 부과 : 미부과

공사비 : 변경 없음

4		건설사업관리자 검토의견

현장내 오염토 발생에 따른 사전절차 이행 기간, 폭염 및 미세먼지 발생에 따른 대책 시행으로 이한 토목공사 작업 불능기간 등을 검토한 결과 공사계약 2차수 공사 준공을 위해 45일의 공기연장이 필요함

공사 구역을 나눠 1단계 공사구역의 골조공사를 선진행하고 2단계 구역은 1단계 골조공사 완료 시점에 맞추어 완료하도록 공정계획을 수정하여 2차공사기간 연장에 따른 총차 공사기간 연장없음

5		처리의견

2차 공사의 공사계약기간 연장 승인 요청건은 그 사유가 적정하므로 총차 공사기간 연장 없이 2차공사 기한을 연장하고자 함.

붙임  1. 2차수 공사기간 변경 요청 검토보고 1부.  끝.

2. 오염토 정화조치명령에 따른 대책수립 검토보고 1부.  끝.