문서번호	정보자원운영과-3656
결재일자	2019.5.8.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정보자원운영과장	데이터센터소장
임연주		김기항	05/08 김현규
협 조
	주무관			고동수

시스템실 운영환경 개선 결과보고

2019. 5.

데이터센터

(정보자원운영과)

시스템실 운영환경 개선 결과보고

데이터센터에서 운영하는 3층 시스템실의 노후화된 액세스플로어를 교체하여 시스템실 운영 환경을 개선하고 그 결과를 보고함.

I		추진개요

□ 추진근거 : 2019년 데이터센터 정보시스템 유지관리 용역 사업과업지시서(MAR-011)

□ 수 행 사 : 삼양데이타시스템(컨소시엄)

□ 작업기간 : ’19.4.23.(화) ~ 5.2(목)

□ 주요작업

○ 액세스플로어 납품 : 500개

○ 액세스플로어 설치 : 650개

- ***************** 액세스플로어 교체

- 데이터센터 보유분 150개를 포함하여 설치

○ 전산실 수평작업 실시

□ 참여인력 : 총 10명

○ 데이터센터 : 2명

- *********************

○ 삼양데이타시스템(컨소시엄) : 2명

- ***********************

○ 수행 업체 : 총 6명

- *******************************

- **********************

Ⅱ		세부작업 결과

□ 액세스플로어 교체

○ 작업일정

- 컨테인먼트 해체 및 재설치 : ‘19.4.23(화)~4.24(수)

- 액세스플로어 교체         : ‘19.4.23(화)~4.26(목)

○ 컨테인먼트 작업 결과

- 작업 현황

*************************************************         - 설치 완료

********

○ 액세스플로어 교체작업 결과

- 설치 전

****

- 설치 후

****

□ 전산실 수평작업

○ 작업일정 : ‘19.4.29(월) ~ 5.2(목)

○ 작업내용

- 액세스플로어 하부 자재 및 쿠션패드를 사용하여 수평 조정

- 시스템실 전체 액세스플로어 평탄화 작업 수행

- 시스템실 바닥 지지대인 패데스칼, 스트링거 등 불량품 교체 설치

□ 폐자재 반출

○ 노후 액세스플로어 반출

*

Ⅲ		향후 계획

○ 불용예정 장비 철거       : ‘19. 11월중

○ 하반기 시스템실 환경정비 : ‘19. 12월중

- 불용케이블 제거 및 철거작업

- 시스템실 액세스 플로어 상부/하부 먼지제거 및 바닥 왁싱