투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경(1회) 시행 (2019년 긴급복구공사 폐아스콘 운반 및 처리용역(2구역) -북부)

우리사업소에서 시행하는 『2019년 긴급복구공사 폐아스콘 운반 및 처리용역(2구역)-북부』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회) 시행코자 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용  역  명 : 2019년 긴급복구공사 폐아스콘운반 및 처리용역(2구역) -북부

나. 용 역 개 요 : 폐아스콘 운반 및 처리 7,703톤

다. 용 역 기 간 : 2019. 3. 18 ~ 2019. 12. 31

라. 용 역 업 체 : *******************************

마. 설계변경내역

구 분		설계변경 금액		증․감액	비고
		당 초	변 경
총 용 역 비		145,690,000	145,690,000	-
용역비	공급가액	132,445,455	132,445,455	-
	부가가치세	13,244,545	13,244,545	-
	계	145,690,000	145,690,000	-

바. 설계변경사유 : 건설폐기물 아스콘 덩어리 신규물량 반영에 따른 설계변경

사. 예산과목 : 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 노후포장도로 정비공사,

시설비 및 부대비, 시설비

따로붙임  1. 보고서 1부.

2. 설계변경사유서 1부.

3. 건설사업관리단 실정보고서 1부.

4. 변경(1회)설계도서 1부.

5. 합의각서 1부.   끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	최완		도로보수과장	이상희		북부도로사업소장	05/08 신응수
협조자	관리단속과장	박대군
시행	도로보수과-4120	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913(번동)	/
전화	02-944-5430	/전송	02-945-5072	/	*********@seoul.go.kr	/	부분공개(6)