문서번호	건축부-7623
결재일자	2019.5.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축관리과장	건축부장
남광연		차무흥	05/08 代유현수
협조

『스페이스 살림 조성공사』

건설폐기물처리용역 계약변경 검토보고

2019. 05.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『스페이스 살림 조성공사』

건설폐기물처리용역 계약변경 검토보고

『스페이스 살림 조성공사 건설폐기물처리용역』관련하여 건설사업관리단에서 1차 계약 변경 및 2차 계약 시행 요청 실정보고가 접수되어 이에 대하여 검토 보고함.

Ⅰ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 스페이스 살림 조성공사 건설폐기물처리용역

○ 위    치 : 동작구 대방동 340-3외 3필지

○ 용 역 사 : 동광건설기계, ㈜동우개발

○ 용역기간 : (총차) 2018.02.19. ~ 2020.08.18.

(1차) 2019.02.19. ~ 2019.05.18.

○ 용역금액 : *********************************

Ⅱ		추 진 경 위

○ ’17. 12. 26 : 스페이스 살림 조성공사 착공

○ ’18. 02. 19 : 건설폐기물처리용역 착수

○ ’19. 05. 07 : 1차 계약변경 요청 및 2차 계약 요청 검토보고

(HTSC 1905-08호(2019. 5. 7.)

Ⅲ		실정보고 내용

○ 관련근거

- 용역계약 일반조건 제19조(설계변경 등)

- 건설폐기물처리용역 1차 계약변경 및 2차 계약 요청 검토보고

[HTSC 1905-08호(2019. 5. 7.)

○ 실정보고 사유 및 내용

- 1차 계약 금액 조정: 건축 및 토목공사 공사 진행에 따른 건설 폐기물 처리용역 계약 차수별 물량 조정(총 물량 변동 없음)

- 2차 계약 시행: 2차 계약분 폐기물 처리를 위한 잔여분 계약 요청

○ 계약금액 변경                                      (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경(시행)	증·감
계약금액	총차	**********	**********	****
	1차	**********	**********	*************
	2차(예정)	*	**********	****
계약기간	총차	2018.02.19. ~ 2020.08.18.	2018.02.19. ~ 2020.08.18.	변동없음
	1차	2019.02.19. ~ 2019.05.18.	2019.02.19. ~ 2019.05.18.	변동없음
	2차(예정)	-	2019.05.19.~ 2020.08.18.	계약요청

※ 총차 금액 및 계약기간 변경없음

Ⅳ		건설사업관리자 검토의견

○ 현장여건 반영에 따른 건설폐기물 처리용역 1차 계약 변경 요청 사항은 적정하며, 2차 계약 내역 또한 적합하게 작성되었음.

Ⅴ		처 리 의 견

○ 검토 결과 관련규정 및 현장 여건에 적합한 것으로 판단되어 건설사업관리자의 의견에 따라 건설폐기물처리용역 계약변경을 시행하고자 함

붙임 : 건설폐기물처리용역 1차 계약변경 및 2차 계약 요청 검토보고 1부.  끝.