투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시지방경찰청장(교통관리과장)
(경유)
제목	별내선(8호선연장) 1공구 건설공사 교통안전시설 개선 변경 승인 협조요청

1. 서울시정 발전에 적극 협조하여 주시는 귀청에 감사드립니다.

2. 교통관리과-36531호(2017.12.21.), -17836호(2018.7.18.)와 관련입니다.

3. 우리본부에서 시행중인「별내선(8호선연장) 1공구 건설공사」의 교통안전시설 개선대책에 대하여  다음과 같이 변경 승인 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사

나. 공사기간 : 2017.08.23.~2023.08.21.

다. 변경사유 ┎ 정거장 신설 공사구간 정원빌라 등 복공판 소음 민원 해소

┕ 2공구 한강 하저터널 시점부 터널 공사를 위한 작업구 필요

라. 요청내용 : 단계별 교통안전시설 개선(30단계) 변경

구 간	요 청 내 용
	당 초	변 경
강동구 아리수로	‘19.04.16.~’21.12.31.(33개월) 4차로 확보	‘19.04.16.~’21.12.31.(33개월) 3차로 확보

붙임 : 1. 교통안전시설 변경 관련도면 1부.

2. 추진현황 1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박중모		신교통과장	성원배		도시철도사업부장	05/08 최병훈
협조자	주무관	박노성		주무관	왕태현
시행	도시철도사업부-4467	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층	/	WWW.seoul.go.kr
전화	3708-8772	/전송	3708-8756	/	p05480548@seoul.go.kr	/	대시민공개