투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
(경유)
제 목	별내선(8호선연장) 1공구 건설공사 교통소통대책 변경 승인 요청

1. 교통운영과-23007호(2017.11.29.), -11634호(2018.7.13.)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인「별내선(8호선연장) 1공구 건설공사」의 교통소통대책에 대하여 다음과 같이 변경 승인 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사

나. 공사기간 : 2017.8.23.~2023.8.21. (점용기간 : 2017.12.1.~2023.6.30.)

다. 변경사유 ┎ 정거장 신설 공사구간 정원빌라 등 복공판 소음 민원 해소

┕ 2공구 한강 하저터널 시점부 터널 공사를 위한 작업구 필요

라. 요청내용 : 단계별 교통소통대책 30단계 변경

구 간	요 청 내 용
	당 초	변 경
강동구 아리수로	‘19.04.16.~’21.12.31.(33개월) 4차로 확보	‘19.04.16.~’21.12.31.(33개월) 3차로 확보

붙임 : 1. 교통소통대책 변경 관련도면 1부.

2. 추진현황 1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박중모		신교통과장	성원배		도시철도사업부장	05/08 최병훈
협조자	주무관	박노성		주무관	왕태현
시행	도시철도사업부-4465	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층	/	WWW.seoul.go.kr
전화	3708-8772	/전송	3708-8756	/	p05480548@seoul.go.kr	/	대시민공개