＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	뚝도아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행[뚝도아리수정수센터내 테니스장 시설개량공사]

1. 우리센터에서 시행중인 『뚝도아리수정수센터내 테니스장 시설개량공사』건에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 뚝도아리수정수센터내 테니스장 시설개량 공사

나. 계약업체 : ㈜영도이엔씨 대표 최수일

다. 공사기간 : 2019.02.25.~2019.05.25.

라. 변경내역

구 분	당초금액(원)	변경금액(원)	감액(원)	비고
계약금액	58,535,720	56,026,000	2,509,720

마. 설계변경 사유 : 신규공종 및 계약물량 증․감사항 발생

바. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비(수선유지비)

붙임 : 1. 설계변경 심의 결과서 1부

2. 설계변경 내역서 및 관련서류 각 1부.  끝.

★주무관	장현순		정수시설과장	김석정		뚝도아리수정수센터소장	05/09 김중영
협조자	주무관	김영후		주무관	양은영		주무관	석은숙
시행	정수시설과-2293	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 왕십리로27	/
전화	02-3146-5579	/전송	02-3146-5508	/	buddhist93@seoul.go.kr	/	부분공개(5)