“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	매점이전 지연에 따른 공사관리 등 협조요청(남산 회현자락 현장 유적박물관)

1. 귀사의 발전과 공사장의 무재해를 기원합니다.

2. 한양도성도감-4099(2019.4.19.)호와 관련하여 제출하신 공정계획 변경 검토의견서〔원택-19-16(2019.4.29.), 남산감리19-17(2019.5.2.)〕에 대하여 다음과 같이 알려드리니 감리원배치계획 및 공사관리에 참고·협조해 주시기 바랍니다.

가. 인포센터 착공지연에 따른 감리원(전기,통신 등) 배치는 매점 이전계획 확정통보 시 까지 탄력적으로 변경·조정하여 운영

나. 인포센터 착공지연 이외의 공사에 대하여는 당초 공사계획과 같이 정상적으로 추진

다. 인포센터 착공을 위한 사전절차(소나무 이전, 시굴조사) 등은 매점이 이전되기 전에 가능한 공정은 선행

라. 인포센터의 건립공사는 「문화재수리 등에 관한 법률」제2조(정의)에 따른 “문화재수리” 에 해당하지 않으므로 공사관리(기술자 배치 등)에 참고하여 반영.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성 감리자 (주)금성종합건축사사무소 이석범님,남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성 시공자 원택건설(주) 오원진님
주무관	왕승찬		도성관리팀장	곽동진		한양도성도감과장	05/09 代김종필
협조자
시행	한양도성도감-4767	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문 청사 1동 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2671	/전송	02-2133-1063	/	vivawang@seoul.go.kr	/	대시민공개