문서번호	공공재생과-4375
결재일자	2019.4.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	특화공간조성팀장		공공재생과장		재생정책기획관		도시재생실장
김지호	신명승		이동일		김승원		04/24 강맹훈
협 조

백년다리(한강대교 공중보행길) 조성 국제현상설계 공모 시행계획

2019. 4

도시재생실

(공공재생과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

백년다리(한강대교 공중보행길) 조성 국제현상설계 공모 시행계획

노들섬 접근성 개선 일환으로 추진 중인 한강대교 공중보행길 조성 관련 창의적이고 획기적인 디자인 발굴을 위해 국제현상설계 공모 시행계획 수립
0

Ⅰ				관련근거		‘

○ ‘19. 3. 8. : 백년다리(한강대교 보행교) 조성 추진계획 수립 방침(시장)

- 창의적이고 획기적인 디자인 발굴을 위한 국제현상설계 공모 추진

Ⅱ				추진경위		‘

○ ‘19. 3.29. : 설계공모 운영위원 위촉 및 회의(1차) 개최

- 운영위원 위촉식, 한강대교 보행교 조성 관련 설명, 운영위원회 운영 일정 등 논의

○ ‘19. 4. 4. : 한강시민위원회 심의

- 교통체계 등 보행에 대한 큰 틀에 대해 검토하고, 소음저감방법 등 설계공모지침 반영

○ ‘19. 4. 5. : 설계공모 운영위원회(2차) 개최

- 공모방식, 참가자격 등 공모지침서(안) 작성 및 심사위원 추천

○ ‘19. 4. 8. : 설계공모 총괄건축가 자문

- 한강대교 아치 경관과 조화되는 보행데크를 조성하고 보행교 조성의 명확한 목표(경관,액티비티) 설정

○ ‘19. 4. 12. : 설계공모 운영위원회(3차) 개최

- 제출서류, 공모일정 등 공모지침서(안) 작성 및 심사위원 선정

○ ‘19. 4. 19. : 설계공모 운영위원회(4차) 개최

- 공모지침서(안) 최종 확인 등

Ⅲ				공모개요		‘

□ 공  모  명 : 백년다리(한강대교 공중보행길) 조성을 위한 국제설계경기

□ 위      치 : 노들섬 ~ 한강대교 ~ 노량진일대

□ 추정공사비 : 253억원

□ 추정설계비 : 13.4억원(조경·토목설계 및 부가세 포함)

□ 공모방식 : 일반공개공모

□ 공모내용 : 기존 교각 활용 보행길 조성에 따라 구조적 안정성 확보 및 창의적 디자인을 통한 경관명소 조성

Ⅳ				시행계획(안)		‘

□ 공모지침(안)의 주요 내용

○ 심사방식 : 사전기술검토를 거쳐 2단계 심사

- 기술검토 : 구조적안전 및 시공성 등 사전 기술 검토 후 1차 심사위원회에 보고

- 1차 심사 : 도판 심사 후 5개 작품 선정,

- 2차 심사 : 모형 및 PT 발표 심사 후 당선작 선정(1차 심사 10일후 실시)

○ 참가자격 : 건축, 토목, 구조, 조경 및 교통 등 관련분야 전문가(사) 모두 참여가능

○ 기술 및 심사위원회

- 기술위원 구성 및 심사방법

· 국내 건축, 시공 구조분야 등의 전문가로 구성

· 기술위원회는 설계경기 규정 및 지침, 관련법규에 기초하여 응모작품의 위반사항에 대하여 판정하고 이를 보고서로 정리하여 심사위원회에 보고

- 심사위원 구성 및 심사방법

· 심사위원회는 7인의 심사위원(건축 3, 구조 2, 조경 1, 교통1)과 1인의 예비위원으로 구성

· 심사위원 중 호선으로 위원장을 선출한 후, 심사기준 및 심사방법 등을 정하여 심사 실시

※  외국인 심사위원은 공모일정을 감안하여 2차 본심사에만 참여

○ 당선작 및 입상작

- 당선작 : 기본 및 실시설계권 부여

- 입상작 : 순위별로 보상금 차등지급

구 분		지 침	보상금액
1차심사결과	순위
최대 4개 작품	2	보상 예산의 4/10 보상 예산의 3/10 보상 예산의 2/10 보상 예산의 1/10	53,680,000 40,260,000 26,840,000 13,420,000
	3
	4
	5

○ 주요제공 자료

- 구조안전성 확보 지침

․ 허용응력 및 구조안전 확보 예시(브라켓 활용) 제공

․ 기술검토시 구조적 안전성 및 시공성에 대한 상대 평가

- 폭염, 한파 등 한강 기후 대응 지침

․ 한강의 기후(폭염, 혹한, 태풍 등) 관련 자료 제공

․ “한강 기후를 고려한 디자인계획 수립” 토록 요구

□ 공모일정

○ ‘19.5.3 : 국제현상공모 공고

○ ‘19.5.3 ~ 6.25(금) : 참가 등록

○ ‘19.5.9 : 현장설명회 (사정에 따라 변경시 홈페이지 공고 예정)

○ ‘19.5.9 ~ 5.15 : 질의 접수

○ ‘19.5.21 : 질의 답변

○ ‘19.7.2 : 작품 제출(우편은 4.2 발송소인만 인정)

○ ‘19.7.10 : 기술 검토

○ ‘19.7.12 : 1참 심사

○ ‘19.7.23 : 2참 심사

○ ‘19.7월 중 : 당선작 및 입상작 발표

Ⅴ				향후일정		‘

○ ‘19.4.23~5.2  : 기술용역타당성 심사 및 용역발주전 심의

○ ‘19.5월        : 공모공고

○ ‘19.7월         : 당선작 선정 및 발표

○ ‘19.8월         : 설계계약 및 착수

○ ‘19.12월        : 설계완료

Ⅵ				행정사항		‘

□ 소요예산

○ 총 1,368,101천원

▸ 기술 및 심사위원회 심사비 :  10,901천원

· 기술위원회 : 1,101천원(3인 × 367,000원)

· 심사위원회 : 9,800천원(7인 × 70만원 × 2일)

▸ 기본 및 실시설계 : 1,340,000천원

▸ 시상금 : 17,200천원

○ 예산확보방안

- ‘19년 추경예산 확보 또는 노들섬 등 예산 일부 활용

□ 작품보관 및 심사장소 확보 협조 : 총무과

○ 작품보관

- 보관기간 : ‘19.7.2~7.10

- 보관장소 : 심사 완료시까지 보안 및 훼손 방지를 위한 장소 확보

○ 작품심사

- 심사기간 : 공고문에 따라 추진

- 심사장소 : 시청본관 3층(대회의실)

붙임 : 1) 과업내용서(안) 1부.

2) 설계공모지침서(안) 1부

3) 설계내역서(안) 1부.  끝.