문서번호	방재시설부-6614
결재일자	2019.5.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
김현곤		오춘섭	전결 05/10 이임섭
협조
	주무관		이원영

- 남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장) -

조경부분(연결로 신설구간 지장수목 이식공사) 실정보고 검토보고

2019. 5.

- 남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장) -

조경부분(연결로 신설구간 지장수목 이식공사) 실정보고 검토보고

「남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)」의 연결로 신설(기존 남산1호터널지하차도 출구)에 따른 지장수목에 대한 실정보고에 대한 검토 보고임.

▶ 관련근거: 남산예장 감리 제2019-143호(2019.04.25.)

Ⅰ

공사개요

□ 공 사 명:「남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)」

□ 위    치: 중구 예장동 4-1번지 일대(23,494㎡)

□ 도 급 비: 32,485백만원(조경: 5,248백만원)

□ 시 공 사: 갑을산업개발㈜, 효림종합㈜, 동원건설㈜, 안산조경건설㈜

□ 공사기간: 2017.08.31. ~ 2019.12.31.

Ⅱ

보고내용

□ 변경사유

○ 연결로(기존 남산1호터널 지하차도 출구) 신설에 따라 저촉되는 지장수목에 대하여 현황조사 및 이식가능 여부를 검토하여 설계변경에 반영코자 함.

□ 현황사진

마가목(R8) - 1주 흰말채나무(H0.5) - 20주	이팝나무(R6) - 4주 화살나무(H0.5) - 80주	남천(H0.3) - 100주
자귀나무(R8) - 4주 흰말채나무(H0.5) - 20주	산수유(R8) - 5주 화살나무(H0.5) - 70주	이팝나무(R8) - 5주 꽃댕강 (H0.3) - 40주
마가목(R8) - 2주 화살나무(H0.5) - 50주	흰말채나무 고사진행,수형불량	자귀나무(R8) 수형불량

□ 지장수목 현황 및 활용가능 여부

구 분	규 격	단위	현황	불량목 및 고사목	이식수량 (활용가능)	비 고
산수유	R8	주	5	2	3	교목
마가목	R8	주	3	1	2
이팝나무	R6	주	4	-	4
이팝나무	R8	주	5	-	5
자귀나무	R8	주	4	4	-
계			21	7	15
흰말채나무	H0.5	주	40	35	5	관목
화살나무	H0.5	주	200	-	200
남천	H0.3	주	100	60	40
꽃댕강	H0.3	주	40	10	30
					275
				105
			380
계

○ 현장조사 결과 수형과 수세가 양호한 수목에 대하여는 설계에 반영코자 함.

□ 수량 증·감 현황

구 분	규 격	단위	당초	변경	증 · 감	비 고
산수유	R8	주	-	3	3	교목이식
마가목	R8	주	-	2	2
이팝나무	R6	주	-	4	4
이팝나무	R8	주	-	5	5
계			-	7	15
흰말채나무	H0.5	주	-	5	5	관목이식
화살나무	H0.5	주	-	200	200
남천	H0.3	주	-	40	40
꽃댕강	H0.3	주	-	30	30
					275
				275
			-
계

□ 공사비 증·감 현황

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
조경공사
Ⅰ. 주차장
1) 이식
나. 지장수목 이식	0	2,492,161	2,492,161	신규단가
10) 식재부대공	257,444	339,358	81,914	기존단가
직접공사비	257,444	2,831,519	2,574,075
간접공사비	42,556	1,404,845	1,362,289
공급가액 계	300,000	4,236,364	3,936,364
부가세	30,000	4,660,000	393,636
도급액	330,000	4,660,000	4,330,000

□ 지장수목 이식 위치 및 공사비 산정검토

○ 이식수목 식재위치는 협의진행 중으로 선행공정의 긴급성을 고려, 우선 현장 내 가식코자 하며, 추후 협의완료 후 요청사항을 반영하여 실정보고 예정

- 설계시 누락된 소방재난본부 하단 전면 부 식재(안)에 대해 협의 진행 중

○ 가식 후 정식 시 소요되는 중간공정(가식재, 재굴취 비용 및 부자재 등)에 대해서는 수량이 소량이므로 시공사에서 공사비 반영없이 진행

- 현장 굴취비와 최종장소 식재비 대한 비용만 반영

Ⅲ

책임건설사업관리기술단 검토의견

○ 당초 설계시 현장여건이 적절히 반영되지 않아 누락된 지장수목에 대하여 협의결과를 반영, 가식 후 본 공사에 활용하기 위한 실정보고는 적정한 것으로 판단됨

○ 식재변경은 관련기관(소방재난본부)과의 협의 결과에 따라 향후 정식위치확정 후 별도 실정보고 예정임

○ 실정보고 적용단가 중 현장여건 상이로 인한 신규단가는 협의률, 수량증감은 기존 계약단가를 적용하였고, 이에 따른 공사비는 추후 설계변경시 반영함이 적적할 것으로 판단됨.

Ⅳ

보고자 의견

○ 본 실정보고는 당초 설계에 누락된 지장수목에 대한 것으로  건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단됨.

○ 실정보고 승인통보하여 현장 반영 조치코자하며 공사비에 대하여는 추후 설계변경하여 반영코자 함.

붙임  건설사업관리기술단 실정보고서 1부.  끝.