문서번호	시설보수과-3802
결재일자	2019.5.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★전문관		시설보수과장
김영원		전결 05/10 오재섭
협조

2019년 자체정밀점검 보고회개최 결과 보고

2019. 5

북부도로사업소

시설보수과

2019년 자체정밀점검 보고회개최 결과 보고

우리 사업소에서 시행하고 있는 2019년 자체정밀점검에 대하여 외부전문가   와 함께 보고회를 개최하고 결과를 보고 함.

▣ 근    거

○ 시설보수과 – 3382(2019. 4.25)호 소장방침 - 2019년 자체정밀점검 보고회 개최계획

▣ 점검대상

○ 22개 시설물

계	일반교량	고가차도	지하차도	하천복개	비고
22	17개소	2개소	1개소	2개소
시설명	길음교,당현1교,도봉교,쌍문교,우이교,월계2교,월곡교,진형교,세운교,마전교,다산교,보문3교,화랑교,장월1교,장월2교,하월곡복개교,하늘다리	북악스카이웨이3교, 북악스카이웨이4교,	솔샘자하차도	당현천2복개,우이천1복개

○ 점검기간 : 2019. 2. 15. ~ 5. 15.

○ 소요예산 : 134,074천원

○ 점검인원 : 16인 (외부전문가 12인, 업무담당 4인)

▣ 보고회 개요

○ 장    소 : 북부도로사업소 2층 회의실

○ 일    시 : 2019. 5. 8.(수)  14 : 00 ~

○ 보고내용 : 점검결과에 따른 보수방안 등 외부전문가 자문

○ 보 고 자 : 각 조별(4개조) 수행 기술자

○ 참 석 자

- 내부 : 소장, 시설보수과장, 담당직원

- 외부 : 각 조별 책임기술자(오성균,송준민,이상범,박훈규)

○ 자문방법 : 책임기술자별 교차 자문

▣ 보고회 결과(위원별 의견 요약)

○ 오성균 위원

- 기 보수부위에 발생된 손상은 하자기간을 확인하여 하자보수로 할 것인지 연간단가로 보수 할 것인지 명기하기 바람

- 시설별 발생된 손상에 대해 적극 보수방안을 제시 하도록 요망

- 우이교 거더 철근노출 부위 소규모 손상이지만 봇 요함

○ 송준민 위원

- 하자처리에 대한 내용을 별도 분리하여 제시 요망

- 균열폭이 0.3mm 이상은 주입보수 제시 요망

- 당현1교 신축이음 A1 단차의 원인과 대책제시 필요

○ 이상범 위원

- 보수.보강 우선순위 선정시 일상보수가 가능하거나 2차 손상을 유발할 수 있는 손상,배수관련 손상은 즉시 보수할 수 있도록 순위조정 요망

- 우이교,월계2교,당현천2복개의 교면포장 소성변형, 파손 등은 우선순위를 상향하여 보수조치 요망

○ 박훈규 위원

- 18년 이후 보수시행 손상부위에 대해서는 보수위치와 현재 상태 등 면밀히 수록 요망

- 진형교 등급은 유지하나 지수변화가 심함에도 소규모 보수를 유지관찰 제시 하였으므로 일상유지 보수가 필요한 부분은 적극 보수하여 전차 점검시와 동일한 수준의 상태를 유지할 수 있도록 조치하는 것이 바람직 함.

○ 소장 당부사항

- 우이교 철근노출부 소규모이어도 시각적으로 보이는 곳은 적극 보수토록 제시

- 시설물 종별구분을 명확히 제시(3종과 법정외 구분)

- 하자부위 최근 3년간 구분하여 기록할 것

- 쌍문교 보도부 망상균열 원인과 대책을 제시

- 세운교 신축이음 하부 누수원인 및 대책을 제시하고 경보음장치에 대해서는 공단에 통보 가동여부 확인 할 것

- 길음교 체수 원인 및 대책을 제시 할 것 등

붙임 : 자문자료 각 1부.끝.