문서번호	기후대기과-8130
결재일자	2019.5.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	그린카인프라팀장	기후대기과장
한영호	오준식	05/10 신대현

- 서울형 집중충전소 설치사업 대행 협약 -

협약기간 만료에 따른 협약기간 연장 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

기후환경본부

(기후대기과)

- 서울형 집중충전소 설치사업 대행 협약 -

협약기간 만료에 따른 협약기간 연장 검토

서울형 집중충전소 설치사업 대행 협약 주체인 서울에너지공사로부터 협약기간 만료에 따른 협약기간 연장 요청이 있어 검토 보고 드림

Ⅰ		일반현황

□ 서울형 집중충전소 설치사업 대행 협약 체결 개요

○ 협약기간 : **************************

○ 협약주체 : 서울에너지공사(스마트에너지부), 서울특별시(기후대기과)

○ 설치대행 사업 현황 : 2개소 11기

- 양재솔라스테이션 서울형 집중충전소(6기)

- 마곡 중앙광장 서울형 집중충전소(5기)

□ 설치대행 사업 별 추진 현황

《 양재솔라스테이션》

○ 사업개요

- 위    치 : 서초구 양재동 201-1(548㎡)

- 설치규모 : 급속 충전기 6기, 태양광 발전시설 20kW, ESS 140kWh

- 소요예산 : *********

위치도	부지 내 충전소 위치

양재 그린스테이션

○ 그간 추진현황

- ’18.7.31. : 서울에너지공사 사업계획(안)제출

- ’18.9.17. : 사업 적정성 검토 및 사업비 교부(기후대기과→서울에너지공사)

- ’19.2.28. : 급속충전기 6기, 태양광, ESS 물품 제작구매 계약 체결       - ’19.3.13. : 전기사용신청(서울에너지공사→한전)

- ’19.3.26. : 도시가스 배관 이설 관련 공사일정 협의(SK E&S↔서울에너지공사)

- ’19.4.25. : 현대자동차 부지경계 조정 및 면적 측량 실시

- ’19. 5월현재 : 급속충전기 및 태양광 구조물 제작 중

《 마곡중앙광장》

○ 사업개요

- 위    치 : 강서구 마곡중앙광장 지하2층 주차장(주차면 5면사용)

- 설치규모 : 급속 충전기 5기

- 소요예산 : *********

위치도	마곡 중앙광장(조감도)

○ 그간 추진현황

- ’18.11.13. : 서울에너지공사 사업계획(안)제출

- ’18.11.27. : 사업 적정성 검토 및 사업비 교부(기후대기과→서울에너지공사)

- ’19. 3.28. : 급속충전기 5기제작구매 계약 체결

- ’19. 5. 8. : 급속충전기 5기 설치 완료

- ’19. 5.16. : 한전전기 입인 공사 완료 후 시운전 실시(예정)

□ 협약기간 연장 협의 요청

○ 요청기관 : 서울에너지공사(스마트에너지부)

○ 요 청 일 : ’19. 5. 3.

○ 협약주체 : 서울에너지공사(스마트에너지부), 서울특별시(기후대기과)

○ 관련근거

- 서울특별시 서울형 집중충전소 설치사업 대행 협약서 제17조(기타 협의사항)

- “2019년 전기저장장치(ESS) 설치 보류 권고” : 녹색에너지과-366(’19.1.7)

○ 연장사유 : 기존 협약기간 만료(대행사업 미완료)

- SK E&S(코원에너지) 사업부지 내 가스배관 이설공사 지연(5월중순 완료예정)

- 산업통상자원부 ESS 세부지침 고시 지연

○ 변경내역 : 협약기간 연장

구 분	기 존	변 경
협약기간	’18. 5. 9. ∼ ’19. 5. 8.	***********************.

Ⅱ		협약기간 연장 검토

	검토 사항
① 협약기간 연장 사유의 타당성 여부 ② 변경 협약기간 적정성 여부 ③ *********************

① 협약기간 연장 사유의 타당성 여부

○ 당초 계획은 지하 시설물 이설 없이 태양광 및 전기차 충전기 설치 예정이었으나 동일부지 내에 있는 수소충전소 성능개선사업 추진으로 사업부지 내 도시가스 배관 이설공사가 수반되어 공사 지연 불가피

	《 양재수소충전소 성능개선 공사 현황》
○ 개 요 - 위 치 : 서초구 양재동 201-1(2,522㎡) - 내 용 ․ 수소생산과 연료전기 발전(300kW)이 가능한 융합형 충전소 구축 ․ 상업용 수소충전소 시설개선 : 15대/일 → 50대/일 ○ 추진현황 - ***************************************** - ***************************************** - ************************************************* - ************************************************* - ************************************************ - **********************************************

○ ESS 화재에 따른 설치 보류 권고 후 산업통상자원부 ESS 세부지침 ’19.3월말 고시 예정이었으나 5월 현재 미 고시

② 변경 협약기간의 적정성 여부

○ ’19.5월 중순 도시가스 배관 이설 완료 후 기초공사 시행으로  ’19. 6월초부터 태양광 및 충전기 설치 가능.

○ 세부지침 고시 후 ESS 제작 및 설치까지 통상 약 2~3개월이 소요되며 산업통상자원부 확인 결과 ’19.6월초 지침 고시 예정

③ *********************************

○ *************************************************************************

※ 환경시설설치 및 수탁운영사업 수수료 산정에 관한 예규 별표1 규정

⇒ ********************************************

Ⅲ		향후계획

○	**********	: ***********
○	******************	: *********
○	****************************	: *********
○	********************	: *********

불임 : 1. 서울형 집중충전소 대행협약 변경 요청 공문 1부.

2. 서울특별시 서울형 집중충전소 설치사업 대행 협약서 1부.  끝.