문서번호	기전과-3429
결재일자	2019.5.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
이동훈		05/10 정판식
협 조

교통신호기 원인자부담공사 변경승인 검토 보고

「밤고개로 확장 전기공사」

2019. 5.

동부도로사업소

(기 전 과)

교통신호기 원인자공사 변경승인 검토 보고

「밤고개로 도로확장 전기공사」관련 원인자부담공사 준공일 변경 및 경찰청 규제에 따른 변경승인 요청에 대한 검토 보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 밤고개로 도로확장 전기공사

○ 공사위치 : 강남구 밤고개로 일원(세곡동 사거리 ∼ 수서IC)

○ 공사기간 : 승인일 ∼ 2019. 06. 30.

○ 원인자 및 업체현황

구 분	원인자	설 계	감 리	시 공
신호	도시기반시설본부 (설비부)	㈜제일엔지니어링	㈜제일엔지니어링	㈜신호티앤에스

□ 검토내용

○ 규제심의(변경) : 서울지방경찰청 교통관리과-9986호(2019.4.24.)

- 신호기(차/보) 위치조정

○ 변경사항 : 토목공정 연기로 인한 공기연장

구 분	원 인 자	당초 준공일	연기 요청일	비 고
신 호	도시기반시설본부 (설비부)	~2019.06.30	~2019.09.30

○ 승인조건

- 승인일로부터 준공승인 후 인수전까지 안전관리 및 사고에 대한 책임은 원인자에게 있음

- 해당 승인사항에 대한 공사완료시 준공승인을 제출하여야 하며, 변경사항(교통안전시설심의 등)이 있을시 별도 협의하여야 함

- 교통신호지주 신설에 따른 통합지주(신호등, 가로등) 설치 및 지주내 가로등 안정기실과 신호점검구는 별도 분리 설치

- 음향신호기 버튼 반경 30cm 이내에는 화단, 노상적치물 등 보행장애 시설이 없도록 설치

- 교차로 및 단일로 횡단보도상 시각장애인용 음향신호기, 잔여시간표시기(숫자형) 신설

- 교통신호제어기 인입전선, 통신(전선)선 및 케이블은 지중화 시공하여야 하며, 각종 전선 및 케이블은 누전 및 감전예방을 위하여 중간 접속 절대금지

- 지중 케이블 공사시 도로횡단 구간은 강제전선관 시공

- 기타 사항은 경찰청「교통신호기 설치․관리 매뉴얼」, 서울특별시「교통신호기공사 업무처리 가이드라인」,「서울시 교통신호지주 표준도면」준수사항 이행 철저

- 교통신호기 주요자재(제어기, 교통신호등 등)는 제작일로부터 3개월 이내의 자재 사용

- 교통안전시설 자료관리시스템(T-GIS) 입력완료 후 준공승인 요청

□ 보고자 의견

○ 도시기반시설본부에서 시행하는 밤고개로 도로확장 전기공사 변경승인 요청에 대하여 현장확인 및 승인서류를 검토한 바, 적정하므로 조건부 승인처리하고자 합니다.

붙임 1. 서울지방경찰청 규제심의 공문 사본 1부.

2. 설계내역서(추가) 1부.

3. 설계도면(추가) 1부.

4. 원인자공사 변경승인 요청 공문 사본 1부.  끝.