문서번호	토목부-8197
결재일자	2019.5.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
백종임		代박운용	05/13 代여용석
협조
	주무관		서민석

고가차도부 천공 및 절단수량 조정 검토보고

[구로고가 철거공사]

2019. 05.

도시기반시설본부

(토 목 부)

고가차도부 천공 및 절단수량 조정 검토보고

[구로고가 철거공사]

「구로고가 철거공사」관련 천공 및 절단 수량이 당초 설계와  상이하여 현장여건을 감안한 실 수량으로 조정하고자 검토하고 결과를 보고 드림.

1		관련근거

❍ 광안건(구) 제2019-26(’19.02.25) 현안사항 보고(교량 SLAB 추가 절단)

❍ 광안건(구) 제2019-58호(‘19.05.08) 고가차도부 천공 및 절단수량 조정 승인요청

2		공사개요

❍ 위    치 : 구로구 가리봉동 140(남부순환로, 디지털단지5거리 주변)

❍ 규    모 : 고가차도 철거 폭 18.5m, 연장 536m

❍ 공사기간 : '18.8. ~ '19.7.

❍ 도 급 비 : 7,217백만원

❍ 시 공 사 : 새천년종합건설㈜ 외 2개사

❍ 감 리 사 : 동부엔지니어링㈜ 외 2개사

3		건설사업관리단 보고내용

□ 고가철거부 천공 및 절단수량 조정

❍ 천공 및 절단 수량이 설계와 상이

- 빔과 빔사이 속채움부 절단, 빔 인양홀 천공, 난간부 시공방법 변경에 따른 실제 절단수량으로 조정

가. 빔과 빔사이 속채움부 수직절단 반영(H1.1m×B0.55m×8개×4개소)

구 분	당 초		변 경
단면도		슬래브 H=0.2m		추가 H=1.1m
사진	-		0.2m 1.1m
사진2	B=0.5m H=1.1m
수량	18.5m×0.2m×4개소=14.8㎡		18.5m×0.2m×4개소+1.1m×0.55m×8개×4개소 =34.16㎡(증 19.4㎡)

나. 인양홀 천공(5경간×8EA×4천공홀×0.35m×0.8, D150mm)

- 설계시 미반영된 거더인양 거치로프의 미끄럼방지를 위한 인양홀 천공

구 분	당 초	변 경
단면도	-	0.2m 0.15m D150mm	천공두께 H=0.35m (슬라브+빔어깨)
사진	-
수량	-	5경간×8EA×4천공홀×0.35m×0.8=45m

다. 난간부 시공방법 변경

구 분	당 초	변 경
단면도		B=0.2m(절단폭) 연석은 깨기로제거(0.25m)
평면도 (변경)
수량	-36m(감, 휠쏘공법)	36m×0.2m=7.2㎡(증, E.D.C.S공법)

❍ 수량 증·감 현황

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증· 감
1. 토공
1.01 기존구조물 철거공
a. 코아천공(인양용)	Φ150	m	204	249	45
2. 고가차도철거공
2.01 구조물절단
a. E.D.C.S절단	THK=300mm이상-주간	m2	29	56	27
c. 휠쏘 절단	THK=300mm이하-주간	m	308	272	-36

❍ 공사비 증·감 현황

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증•감	비 고
직접공사비	78,431	98,112	19,681
제 경 비	37,996	47,388	9,392
공급가액	116,427	145,500	29,073
부가가치세	11,643	14,550	2,907
도급금액	128,070	160,050	31,980

※ 적용단가 : 계약단가 적용

4		검토결과

❍ 고가차도 천공 및 절단 수량이 당초 설계와 상이하여 현장여건을 감안한 실 수량으로 조정하고자 하는 건설사업관리단의 보고내용은 타당한 것으로 판단됨.

5		조치계획

❍	위 건에 대하여 실정보고 승인 통보하고 추후 설계변경에 반영코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 실정보고 검토의견서 1부.  끝.