문서번호	시설보수과-1244
결재일자	2019.5.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
윤종현	이호복	조선행	05/14 이철범
협 조
	주무관		김지응

슬러지 1처리장 수배전반 교체계획

2019.05.

난지물재생센터

(시설보수과)

슬러지 1처리장 수배전반 교체계획

◇ 장기간 사용으로 성능이 저하된 슬러지  1처리장(발전기동) 수배전반을     교체하여 수처리 설비의 안정적인 전력공급 및 안전사고 예방에 철저를

기하고자 함

1		설비현황

6.6KV 수전반 (2008년)	380,220V 배전반 (2008년)	TR 750KVA (2008년)

❍ 6.6KV/380V,220V (TR:750KVA,2대)등 총:17면

-  내구년한 경과(내구년한 기준 : 10년 ,조달청 고시기준 적용)

2		사업개요

❍ 총사업비 : 420백만원

❍ 사업기간 : ’19,05~09

❍ 시행방법 : 수배전반 구매(제3자단가) 및 설치 구분 발주

연번	건 명	추정소요예산	계약방법	추진사유
1	수배전반 제작구매	400백만원	제3자단가	성능저하,절연저감으로 안전사고 우려
2	수배전반 설치	20백만원	수의계약	2천만원미만소액

❍ 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,기계장치,시설비및부대비,

수배전반 교체

3		향후일정

❍ 방침수립 및 설계내역 작성 : ’19.5.

❍ 조달구매 발주 및 수의계약 : ’19.5.~8.

❍ 제작설치 ․ 사업완료   : ’19.5.~9.

4		기대효과

❍ 기기의 최적 기능 유지로 수처리 설비의 안정적인 전력공급 및 안전사고 예방.

끝.