문서번호	정수과-2146
결재일자	2019.5.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김관우		강성욱	05/14 이달영
협 조
	주무관			박근희

「염소용기 재검사」 납품기한 연장 보고

2019. 05.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

「염소용기 재검사」 납품기한 연장 보고

우리 정수센터 염소용기 재검사 수행이 액체염소 소진 지연으로 인하여「염소용기 재검사」납품기한을 연장하고자함

Ⅰ		개 요

□ 계약건명 : 염소용기 재검사

□ 계약기간 : 2019. 02. 22. ~ 2018. 05. 23.

□ 계약업체 : *****

○ 소재지 : ********************************

□ 계약금액 : 9,900,000원(금구백구십만원정)

Ⅱ		납품기한 연기사유 및 기간

□ 연장기한 : 22일 연장

당 초	변 경
’19.02.22. ~ ’19.05.23.	’19.02.22. ~ ’19.06.14.

□ 연기 사유

○ 우리센터 염소용기 재검사 진행관련하여 총 보유용기 병수의 부족으로  인하여 용기의 염소소진 상황에 따라 재검사용기의 반입·반출이 이루어지는 실정임. 이에 염소소진 지연으로 부득이 『염소용기 재검사』기한을 연장코자 함.

- 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅲ		행 정 사 항

□ 납품기한 연장에 따른 변경계약 시행.

붙임  합의각서 1부.  끝.