문서번호	계약심사과-18263
결재일자	2018.11.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		심사총괄팀장	계약심사과장
임장경		류종기	11/16 김수정
협 조
	설비심사팀장			代김광찬
	토목심사1팀장			윤병헌
	건축심사팀장			서홍일

안양천 횡단보도교 신설사업 설계VE·계약심사 통합심사 실행계획

2018. 11.

계약심사과

안양천 횡단보도교 신설사업

설계VE·계약심사 통합심사 실행계획

금천구청(도로과)에서 시행하고 있는「안양천 횡단보도교 신설사업」에 대해 VE전담팀을 구성하고, 설계VE·계약심사 심사 계획을 수립하여 추진하고자 함.

□ 추진 근거

○ 건설기술진흥법 시행령 제75조

○ ’18년 설계경제성(VE) 심사 운영계획(계약심사과-579, ’18.1.11)

□ 심사 개요

○ 신청부서 : 금천구청(도로과)

○ 사 업  명 : 안양천 횡단보도교 신설사업

○ 위    치 : 금천구 금천현대아파트 주변

○ 사업내용 : 보행교량 설치

- 사업규모 : B=4.5m, L=200m

○ 공 사 비 : 8,500백만원

○ 용역기간 : ’18.7. ~ ’18.12.

○ 설계공정률 : 90%

□ 심사 계획

○ 주요 심사내용

- 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

- 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성

- 시설물 안전 및 기능 향상의 가능성

- 설계예산서 도서간 일치 여부 및 공사원가 적정성 등

□ 시행 방법 : VE전담팀을 구성하여 심사

○ VE전담팀, 발주부서, 설계사, 주관부서 등 15명 내외

구성원	구성내용	역할
VE리더	▸ 천용민 위원 ㈜무한리더스	․ 워크숍 준비, 진행 ․ 결과보고서 작성
진행보조요원	▸ 이재성 요원 ㈜무한리더스
VE업무총괄	▸ 임장경 주무관 계약심사과	․ 설계VE 계획, 회의지원 등
외부 검토위원 (3개분야)	▸ (토목구조) 전진웅 위원 ㈜동일기술공사 ▸ (토목구조) 윤영만 위원 수원과학대학교 ▸ (토목시공) 김문식 위원 산하종합기술	․ 기능 분석 ․ 기술 검토 ․ 아이디어 제안 ․ 아이디어 평가 ․ 제안서 작성
내부 검토위원 (3개분야)	▸ (토목) 전재형 주무관 계약심사과 ▸ (조경) 배명권 주무관 계약심사과 ▸ (전기) 정대진 주무관 계약심사과	․ 설계도서 형식 검토 ․ 계약심사
발주부서	▸ 남계동 주무관 금천구청 도로과	․ 사업설명, 제안서 검토
설계자(5명)	▸ 신승호 이사 ㈜동해종합기술공사 ▸ 분야별 설계자	․ 사업설명회 준비 ․ 제안서 원가분석 등

□ 설계VE․계약심사 통합심사 회의 세부일정

일 시	내 용
’18.11.27(화) 10:00~17:00	- 사업설명 및 현장답사, 기능분석・정리 ‣ 장소 : 금천구청 지하1층 에코교실
’18.11.29(목) 10:00~17:00	- 검토회의 : 대안 구체화, 설계도서 형식검토 ‣ 장소 : 금천구청 지하1층 에코교실
’18.12.6(목) 14:00~17:00	- 최종검토회의 : 제안 채택회의, 설계도서 보완 통보 ‣ 장소 : 금천구청 지하1층 에코교실
’18.12.20(목)	- 설계도서 수정본 제출 (교량안전과 ⇒ 계약심사과)
’18.12.31(월)	- 설계VE․공사원가 통합심사 결과 통보

□ 설계VE 심사 시행절차

구분		추진 일정		수행 절차		추진 내용
계획수립		’18.11.14		설계경제성 심사 신청 (발주부서)		▸ 심사 신청서 접수
		’18.11.16		설계VE․계약심사 통합심사 계획수립 (계약심사과)		▸ 추진일정, 시행방법 등 ▸ 설계VE팀 구성
설 계 VE ․ 계 약 심 사 통 합 심 사 운 영		’18.11.27 ~ ’18.12.6 (1일차~10일차)		설계VE 검토회의 【설명회,워크숍,이행회의】 (VE전담팀)		▸ 자료 사전검토 ▸ 사업설명 및 현장답사 ▸ 1,2차 워크숍 - 대안발굴, 제안서 작성 - 설계예산서 검토 - 설계제안 채택회의 ▸ 최종 검토회의 : 의사결정
		’18.12.7 (11일차)		VE 제안서 통보 (계약심사과 → 발주부서)		▸ VE 제안서 통보
		’18.12.20 (24일차)		설계도서 수정 및 제출 (발주부서 → 계약심사과)		▸ 설계도서 수정 및 제출
		’18.12.20 ~ ’18.12.31 (37일차)		계약심사 (계약심사과)		▸ 분야별 계약심사 ▸ 설계VE 결과보고서 작성
		’18.12.31 (37일차)		통합심사 결과통보 (계약심사과 → 발주부서)		▸ 심사결과 통보

□ 소요예산 : 7,471천원

○ 외부위원 수당 : 6,971천원

- VE리더(기술사+보고서작성)  : 2,311천원(2,311천원 × 1명)

- 검토위원(기술사)           : 3,976천원(994천원 × 4명)

- 진행보조요원(초급기술자)    : 684천원(684천원 ×1명)

※「설계VE 위원 수당 지급기준 개선 계획」(계약심사과-15310, ’18.9.20)에 따라 산출

○ 회의다과비 등 운영비 : 500천원

□ 지급부서

○ 신청부서(금천구청)에서 외부위원 수당 지급

○ 계약심사과에서 회의운영비 지급

□ 향후계획

○ 설계VE․계약심사 통합심사 결과 통보 ----------  ’18.12.31

붙   임 : 1) 설계경제성 심사 요청 공문 1부.

2) 설계경제성 심사 신청서 1부.  끝.