투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재(수배전반) 설계변경 및 납기연기 계약 의뢰(노들섬 특화공간 조성 전기공사)

1. 우리 본부에서 시행중인 『노들섬 특화공간 조성 전기공사』에 소요되는 관급자재(수배전반)에 대하여 아래와 같이 설계변경 및 납품기한 연기 계약의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 수배전반 변경 구매의뢰(노들섬 특화공간 조성 전기공사)

나. 변경구매 현황(조달구매)

○ 금    액 : *********************************

○ 계 약 자 : *****

○ 계약번호 : ***********

○ 조달수수료 별도

다. 납품기한 변경 현황

○ 당    초 : 2019.05.31

○ 변    경 : 2019.08.31

라. 변경사유 : 주관부서 요구사항 반영(운영자)으로 수배전반 용량 변경에 따른 금액변경 및 건축공기 연장에 따른 납기연기 필요

따로붙임  1. 보고서 1부.

2. 변경내역서 및 관련공문 1부.  끝

	설비부장
주무관	곽용길		열빛총괄과장	代곽용길		설비부장	05/14 代오삼록
협조자	재무예산과장	홍수열
시행	설비부-7046	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8602	/전송	02-3708-8659	/	yong9345@seoul.go.kr	/	부분공개(5)