문서번호	도시철도토목부-5078
결재일자	2019.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
최경호		최진규	05/15 정대현
협 조
	주무관			김근수

『하남선 궤도공사(2공구)』

궤도시설물(레일도유기) 변경 설치 검토

2019. 05.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『하남선 궤도공사(2공구)』

궤도시설물(레일도유기) 변경 설치 검토 보고

『하남선 궤도공사(2공구)』시행 중 급곡선부(R=300m이하)에  레일마모 및 마찰소음 방지를 위하여 설치되는 레일도유기에   서울교통공사 요청 사항인 기능이 향상된 레일도유기 설치 검토 요청이 있어 아래와 같이 검토 보고 함.

Ⅰ		관 련 근 거

❍ 5호선 하남연장선 궤도공사 레일도유기 부설관련 협조 요청

⇒ 서울교통공사 궤도처-23125호(2018.12.11.)

Ⅱ		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 궤도공사(2공구)

❍ 공사구간 : 경기도 하남시 덕풍동 ~ 창우동

❍ 계약기간 : 2018.11.05. ~ 2019.11.04.

❍ 계 약 자 : 화성궤도(주)

❍ 건설사업관리 : ㈜신승엔지니어링외 2

❍ 계약금액 : 4,585,827천원

Ⅲ		현 황

❍ 하남선은 레일도유기 총 24대 설치 예정으로 현장점검을 통하여 정상작동 여부를 확인하는 형식임

❍ 하남선 운영사인 서울교통공사에서 열차 운행중 실시간으로 레일도유기 작동상태 확인 및 그리이스 분출량 조정 등 기능이 향상된 레일도유기 설치 요청

Ⅳ		검 토 사 항

❍ 하남선은 철도전용 무선통신망(LTE-R) 설치되어 실시간 데이터 송수신 가능

❍ 레일도유기 제품 비교

구 분	A사 레일도유기(설계)	B사 레일도유기(개선)
방식(센서)	적외선 포터센스 감지식	열차감지용 초음파
분 출 량	0.1cc/회(조절가능)	0.14cc/회(조절가능)
도유거리	350m~400m	300m~400m
경 제 성	830만원/대(설계가격)	설계당시 견적서 없음
점검방식	현장확인 및 수동제어	모니터 확인 및 원격제어
적용사례	서울교통공사 등 국내 운영사 다수	서울교통공사,부산교통공사,한국철도공사
생 산 국	한 국	한 국
제품사진

❍ B사의 무선통신망을 이용한 레일도유기 작동시스템

스마트컨트럴 시스템 구성도	모니터링 화면

❍ 사업비 검토

- 레일도유기 기존 계약금액 동일 단가(24대 * 7,350천원 = 176,400천원)

· 래일도유기에 스마트컨트럴 시스템 설치에 따른 추가 비용 없음

· 철도전용 무선통신망(LTE-R)을 이용 추가 통신비 없음

❍ 특정제품선정심사위원회 상정하여 심의 후 설계변경(제품변경) 추진

Ⅴ		개 선 효 과

❍ 레일도유기 현장점검 없이 모니터를 통한 실시간 작동여부 확인

❍ 하남선(5호선 연장) 건설공사에 구축되는 철도전용 무선통신망(LTE-R)을 활용

❍ 심야의 레일도유기 유지관리업무를 축소하여 업무의 효율 증대와 안전성 확보

Ⅵ		향 후 계 획

❍ 특정제품선정심사위원회 개최하여 레일도유기 선정

❍ 서울교통공사 의견을 반영 통보

❍ 계약금액 변경 없이 레일도유기 변경 추진

붙임 : 관련문서 사본 1부.  끝.