문서번호	급수운영과-10778
결재일자	2019.5.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강병국		05/15 김정수
협 조

준공기한 연기보고

2019. 5.

명에 의거「2019년 양천구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사(연간단가)」담당업무 수행중 준공기한 연기사항이 발생하여 아래와 같이 보고 합니다.

2019.  5. 15.

보고자 시설6급  성명 강 병 국

1. 공사 현황

가. 작업지시번호 :  시설물보수(양천NO.13, 양천NO.15)

나. 공사 위치 : *************** 외 1개소

다. 준공 기한 :

- 2019. 5. 2 ~ 2019. 5. 13(양천NO.13)

- 2019. 5. 2 ~ 2019. 5. 17(양천NO.15)

2. 보고 내용

- 도로관리청 굴착허가 지연으로 당초기한내 공사완료가 불가하여 공사 가능시까지 기간 연장이 필요한 실정임

3. 조치 의견

- 상기와 같이 준공기한내 공사가 불가함에 따라 공사기한을 연기 조치하여 공사 시행에 만전을 기하고자 합니다.

- 귀책사유 및 지체상금 부과여부 : 미부과

- 공사기한 변경

연번	지시 번호	공사기한 변경		비 고
		당 초	변 경
1	시설물보수(양천NO.13)	2019. 5. 2 ~ 2019. 5. 13	2019. 5. 2 ~ 2018. 5. 31
2	시설물보수(양천NO.15)	2019. 5. 2 ~ 2019. 5. 17	2019. 5. 2 ~ 2018. 6. 2

끝.