문서번호	기전과-3548
결재일자	2019.5.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
이동훈	05/15 정판식

교통신호기 원인자부담공사 변경승인 검토 보고 「청담동 삼성생명빌딩 신축공사 중 교통안전시설물 설치공사」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 5.

동부도로사업소

(기 전 과)

교통신호기 원인자부담공사 변경승인 검토

청담동 삼성생명빌딩 신축공사 주변 교통신호기 설치공사에 따른 원인자부담공사 준공일 변경승인 요청에 대한 검토 보고

공사개요

○ 공 사 명 : 청담동 삼성생명빌딩 신축공사 주변 교통신호기 설치공사(신호)

○ 공사위치 : 강동구 청담동 3번지 일원

○ 공사기간 : 승인일 ~ 2018. 12. 31.

○ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계	감 리	시 공 사
신 호	삼성물산㈜	건영이앤씨㈜	㈜협우지여 엔지니어링	건영이앤씨㈜

검토내용

○ 규제심의 : 서울지방경찰청 교통관리과-8559호(2018.04.10.)

- 경보신호등 신설 등

○ 변경사항 : 민원 및 사용전점검 협의 지연으로 인한 공사기간 연장 요청

- 내   용

구 분	원 인 자	당초 준공일	연기 요청일	비 고
신 호	삼성물산㈜	~2018.12.31.	~2019.05.30.

○ 승인조건

- 승인일로부터 준공승인 후 인수전까지 안전관리 및 사고에 대한 책임은 원인자에게 있음

- 해당 승인사항에 대한 공사완료시 준공승인 서류를 제출하여야 하며, 변경사항

(교통안전시설 심의 등)이 있을시 별도 협의하여야 함

- 교통신호지주 신설에 따른 통합지주(신호등, 가로등) 설치 및 지주내 가로등 안정기실과        신호점검구는 별도 분리 설치

- 음향신호기 버튼 반경 30cm 이내에는 화단, 노상적치물 등 보행장애 시설이 없도록 설치

- 교차로 및 단일로 횡단보도상 시각장애인용 음향신호기, 잔여시간표시기(숫자형)신설

- 교통신호제어기 인입전선, 통신(전송)선 및 케이블은 지중화 시공하여야 하며, 각종 전선 및 케이블은 누전 및 감전예방을 위하여 중간접속 절대금지

- 지중 케이블 공사시 도로횡단 구간은 강제전선관 시공

- 기타 사항은 경찰청「교통신호기 설치․관리 매뉴얼」, 서울특별시「교통신호기 공사 업무처리 가이드라인」, 「서울시 교통신호지주 표준 도면」준수사항 이행 철저

- 교통신호기 주요자재(제어기, 교통신호등 등)는 제작일로부터 3개월 이내의 자재 사용

- 교통안전시설 자료관리시스템(T-GIS) 입력완료 후 준공승인 요청

검토의견
- 삼성물산㈜에서 시행하는 청담동 삼성생명빌딩 신축공사 중 교통신호기 설치공사 준공일 변경승인 요청에 대하여 현장확인 및 승인서류를 검토한 바, 적정하므로 조건부 승인처리하고자 합니다.

붙임 : 1. 서울지방경찰청 규제심의 공문 1부

2. 설계내역서 1부

3. 설계도면 1부

4. 준공기한 연기 요청 공문 1부.  끝.