문서번호	지역경제과-20351
결재일자	2019.5.15.
공개여부
방침번호

★주무관		유통관리팀장		지역경제과장		기획재정국장
김진석		최봉운		엄원식		05/15 라병오
협조	주차기획팀장		김동원
	재산관리팀장		송경택
	도시재생1팀장		김은경
	도시관리팀장		최경식

★ ◉

- 마장축산물시장 주차장 사업선정에 따른 -

부서별 추진사항 점검회의 결과보고

(지역경제과)

- 마장축산물시장 주차장 사업선정에 따른 -

부서별 추진사항 점검회의 결과보고

□ 회의개요

○ 일    시: 2019.5.13.(월) 16:00~17:00

○ 장    소: 7층 부구청장실

○ 참석인원: 9명

- 부구청장 주재

- 기획재정국장, 재무과장, 재산관리팀장, 도시관리팀장, 주차기획팀장, 도시재생1팀장, 유통관리팀장, 담당주무관

○ 회의내용: 마장축산물시장 주차장 사업선정에 따른 부서별 문제점                검토 및 향후 대책, 개선방안 토론

□ 회의결과

	≪ 총 평 ≫
○ 마장축산물시장 주차장 사업선정 후 사업진행이 더욱 중요함 ○ 최적의 조건으로 국유지 매입을 위한 다양한 대응방안 필요 ○ 복합행정으로 부서 간 긴밀한 업무협조 및 공유필요 ○ 예산낭비 없이 사업이 진행 되도록 업무추진에 만전을 기할 것

1. 주차장 부지매입 방안 검토 ------------ <재무과, 교통지도과>

○ (감정평가 실시) 현 제방 및 주차장 현황에서 감정평가액이 산정되는 방안 검토

○ (부지매입비 산정) 공공목적으로 조성되는 주차장 부지인 만큼  국토부, 자산관리공사 등 유관기관과 충분한 사전 협의가 필요하며, 용도폐지건은 도시계획시설(주차장) 사업인가고시 절차에 맞추어 추진

○ (주차장 사용료 정리) 현재 사용되고 있는 주차장에 대해 향후 매입과정에서 사용료 등 장애요인이 없도록 사전 조치 필요

2. 도시계획도로 선형변경 ------------------------ <도시계획과>

○ (안건심의) 2019.6.19. 개최되는 市도시계획위원회(市시설계획과)에서 주차장 부지 내 도시계획도로의 선형이 변경되어 사업에 지장이 없도록 노력 필요

3. 기초자료 작성 철저 ------------------- <재무과, 교통지도과>

○ (대상부지 면적) 입안방침, 토지매입, 건축설계 등 주차장 조성사업 시 필요한 대지면적에 대해 공부, 측량 등 기초자료를 정확히 파악하여 업무추진에 혼란이 없어야 할 것임

4. 서울시 투자심사 진행 ------------- <교통지도과, 도시재생과>

○ (설계자료) 입안방침 수립 시 부지면적 및 건축물 연면적 확정, 층별 배치, 용도, 소요예산, 재원확보 대책 등 서울시 투자심사(2019.7.16.) 일정에 차질 없도록 만전을 기하기 바람

□ 향후계획

○ 마장주차장사업 추진 2차 검토보고회 ------------------------- 5.27.(월)

○ 입안방침 수립 -------------------------------------------------------- 5.30.(목)

○ 市도시계획위원회 ---------------------------------------------------- 6.19.(수)

○ 市투자심사의뢰 ------------------------------------------------------- 7.16.(화)

붙임 회의자료 1부.  끝.