문서번호	토목부-8435
결재일자	2019.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장		시설국장
이상욱B	김동현	代김동현		05/15 이택근
협 조

설계용역 착수보고회 결과보고

(노들로 구조개선 기본 및 실시설계)

2019. 5.

도시기반시설본부

(토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

설계용역 착수보고회 개최계획

[노들로 구조개선 기본 및 실시설계용역]

보행자 및 대중교통 중심으로 도로구조를 개선하기 위한 “노들로 구조개선 기본 및 실시설계용역”에 대한 착수보고회를 개최하고 결과를 보고드림

1	사업개요

○ 사 업 명 : 노들로 구조개선 기본 및 실시설계용역

○ 규    모 : · 연장 : 8.5km (양화교~한강대교 남단)

· 폭원 : 8차로 (양화교~양화대교 남단), 4차로 (양화대교 남단~한강대교 남단)

○ 설계기간 : '19.4.22. ~ '20.2.15.

○ 설계금액 : 379,470,000원

○ 설 계 사 : ㈜동명기술공단종합건축사사무소, ㈜도화엔지니어링

○ 위 치 도

2	추진경위

○ '86.07.12. : 노들로 자동차전용도로 지정

○ '14.12.26. : 노들로 일부구간(2.1km) 자동차전용도로 해제

○ '15.07.30. : 노들로 잔여구간(6.4km) 자동차전용도로 해제

○ '16.03.~‘17.05. : 노들로 일반도로화에 따른 도로개선 타당성조사 및 기본계획

○ '19.04.22. : 노들로 구조개선 기본 및 실시설계 착수

○ '19.05.02. : 착수보고회(도로계획과 주관)

○ '19.05.09. : 노들로 구조개선 기본 및 실시설계 이관 (도로계획과 → 토목부)

3	착수보고회 개요

○ 안  건 : 노들로 구조개선 기본 및 실시설계

***********2019. 5.15.(수) 14:00

****장  소 : 11층 대회의실

****참석자 : 시설국장, 토목설계과장, 분야별 담당자4명, 설계사

****보고자 : 용역사업책임자(㈜동명기술공단종합건축사사무소 양진익 전무이사)

****보고내용

- 용역개요 및 과업내용

- 전차용역(타당성조사 및 기본계획)검토 및 추진방향

- 구간별 검토사항 등

4	주요의견

****주민의견을 수렴하고 접근성을 고려하여 설계

- 교차로 설치에 대한 주민의견을 충분히 수렴하고, 주민 접근성을 고려하여 위치를 선정.

****설계구간 주변 기추진 중인 사업에 대한 연계 가능성 검토

- 영등포 고가차도 철거 · 노량진 고가차도 철거 계획 · 백년다리 등 기추진 중인 주변사업과 연계가능성을 검토하여 설계추진

****현장조사 및 관계기관 협의철저

5	향후계획

○ '19.6. ~ ‘19.10. : 기본설계

○ '19.10. ~ ‘20.2. : 실시설계

○ '20.02.15. : 설계 완료

붙임 : 착수보고 PPT 1부.  끝.