문서번호	시설관리과-9244
결재일자	2019.5.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관	시설관리과장	북부수도사업소장
박미영	변재홍	05/15 박병권
협 조
	급수운영과장		유승효
	주무관		정성식
	주무관		이선우
	주무관		박상권
	주무관		윤승구
	주무관		최용진

2019년 미아아리수올림터 외 8개소 정밀안전진단 용역 착수보고회 개최 결과 보고

2019.  5.

북부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2019년 미아아리수올림터 외 8개소

정밀안전진단 용역 착수보고회 개최 결과 보고

우리사업소에서 용역추진중인 『2019년 미아아리수올림터 외 8개소 정밀안전진단용역』과 관련하여 용역 착수보고회를 개최하고 결과를 보고드림.

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 2019년 미아아리수올림터 외 8개소 정밀안전진단 용역

❍ 용역개요 : 정밀안전진단(9개소),내진성능평가(6개소)

❍ 용역기간 : 2019. 4. 24. ~ 2019. 11. 19.(210일)

❍ 계 약 자 : *******************************

❍ 용역위치 : 서울특별시 강북구, 노원구, 도봉구

❍ 용 역 비 : ************

❍ 대상시설물 현황 : 배수지 3개소, 아리수올림터 6개소

□ 착수보고회 개요

❍ 보고일시 :  2019. 5. 13.(월) 14:00 ~ 15:30

❍ 장    소 :  북부수도사업소 1층 회의실

❍ 보 고 자 :  *******************

❍ 참 석 자 :  총17명

- 내부참석자 : 사업소장 외 8명

- 외부참석자 : 용역 사업책임기술자 외 6명

- 용역 착수보고회 사진

○ 주요내용

- 과업 개요

- 과업수행방법(과업수행계획, 중점점검사항, 시설물평가, 안전품질관리)

- 안전관리방안 및 협조사항 등

- 질의 응답

○ 참여자 검토의견

- 용역 착수보고회 지적 검토사항(별첨 참조)

□ 향후일정

❍  배수지 항청소와 연계하여 점검 및 진단시행 : ‘19. 5월 ~8월

❍  중간보고회 시행 :  ‘19. 8월

❍  본청 심의회〔기술심사담당관〕 및  용역 최종 보고회 : 10월

❍  준공시행 :  ‘19. 11. 19.

붙임 : 용역 착수보고 검토사항 1부.  끝.