문서번호	설비부-7163
결재일자	2019.5.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
이강욱	代이강욱	05/16 임정규

『서울의료원 권역응급의료센터 건립 증축 기계설비공사』

관급자재 납품기한 변경 검토보고

2019.05.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『서울의료원 권역응급의료센터 건립 증축 기계설비공사』

관급자재 납품기한 변경 검토보고

「서울의료원 권역응급의료센터 건립 기계설비공사」와 관련 관급자재에 대하여 건설사업기술단으로부터 납품기한 변경 보고서가 제출되어 검토 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 관급자재 납품기한 연기 요청(동일감리 제19-066호(2019.05.15.))

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사

□ 공사위치 : 서울시 중랑구 신내로 156(신내동 316)

□ 공사규모 : 지상3층(연면적 3,669.62㎡),증축, 의료시설(종합병원)

□ 공사기간 : ‘19.04.08.~’20.10.07(1차‘19.04.08.~’20.02.28)

□ 공 사 비 : 4,753백만원(도급 3,037, 관급 1,660, TAB 56)

Ⅲ		검토내용

□ 납품기한 변경사유 : 관급자재 설치시기 미 도래

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 변경현황

- 관급                                                       (단위 : 원)

공종별	품대계	납품기한		납품요구번호 (계약번호)	비고
		변경전	변경후
냉난방기 구매	58,905,820	2019.05.18	2020.10.30	12-19-2-14138-00	3자단가
팬코일 유닛 구매	11,212,260	2019.05.26	2020.10.30	12-19-2-15748-00	3자단가

□ 감리단 검토의견

- 현재 토목공정인 부지정지 중으로 관급자재 설치 시기 미 도래되어 납품기한 연장함이 적정 함.

Ⅳ		조치의견

□ 건설사업단의 공사기간 연장 검토보고가 적정하여 현장여건에 맞게 납품기한을 연장하여 공정관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 검토 보고서(합의각서 포함) 1부.   끝.