함께해요! 2019 을지태극연습!
	서울특별시
수신	서초구청장(물관리과장)
(경유)
제목	사당천 단면확장 우선시공구간 설계변경에 따른 협조 요청

1. 하천관리과-3837(2019.3.18.)호 관련입니다.

2. 사당역 일대 침수저감을 위해 시행중인 사당천 단면확장 사업 중 우선시공구간에 대하여 첨부와 같이 설계변경(연장추가) 하고 그 성과품을 송부하오니 현재 진행중인 공사에 반영하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 사당천 단면확장 잔여분(상류구간)에 대한 개략도서를 함께 송부하오니, 기존 업체를 활용한 지장물 이설 선시행, 교통처리 계획 수립 등을 통하여 ‘20년 우기 전 사업을 완료 할 수 있도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

첨 부 : 1.위치도 1부.

2.성과품 1부(별송).끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	윤희성		청계천관리팀장	민형일		하천관리과장	05/16 한유석
협조자
시행	하천관리과-7393	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화		/전송		/		/	대시민공개