문서번호	공원시설과-1382
결재일자	2019.5.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	공원부장
임이환		김호규	05/16 김인숙
협조
	생태환경과장		최병언

- 여의도샛강 분류부 생태거점 조성 통신공사 -

설계변경(정산) 시행 보고

2019. 5

공 원 부

- 여의도샛강 분류부 생태거점 조성 통신공사 -  설계변경(정산) 시행 보고

우리본부에서 시행중인『여의도샛강 분류부 생태거점 조성 통신공사』에 대하여 현장여건 변동에 따른 물량 증․감 내역 반영한 설계변경(정산) 사항을 보고 드림.

공사개요

○ 공 사 명 : 여의도샛강 분류부 생태거점 조성 통신공사

○ 공사기간 : 2018. 04. 05. ~ 2019. 12. 28.

○ 도 급 비 : 29,566,860원

○ 도 급 자 : 주식회사 대한종합산전   대표 이섭

설계변경내용]

구분	당 초	변 경	변경사유	증ㆍ감
배관 및 배선	▷전선관 CD-P 포설 1609m ▷0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) 포설 -2C 6㎟ : 707m	▶전선관 CD-P 포설 1482m ▶0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) 포설 -2C 6㎟ : 643m	공사현장 여건에 따른 물량 변경	감)1,957,682원
맨홀	▷통신용맨홀 800*800*800 3식	▶통신용맨홀 800*800*800 5식		증)1,558,102원
제경비	▷산재 및 고용보험료 : 774,893원 ▷국민건강보험료 : 289,700원 ▷노인장기요양보험 : 18,975,원 ▷국민연금보험료 등 : 424,326원 ▷이윤 등 : 5,611,910원,	▶산재 및 고용보험료 : 738,983원 ▶국민건강보험료 : 0원 ▶노인장기요양보험 : 0원 ▶국민연금보험료 등 : 0원 ▶이윤 등 : 5,297,921원,	실사용 금액으로 정산	감)1,082,900원

설계변경(정산) 금액

[단위:원]

구 분		당 초	변 경	증 , 감	비 고
도급비	공급가액	26,878,964	25,531,259	감)1,347,705
	부가세액	2,687,896	2,553,125	감)134,771
	계	29,566,860	28,084,380	감)1,482,480

조치계획

○  상기와 같이 설계변경(정산) 후 공사준공에 철저를 기하고자 함.

○  계약부서에 변경계약 요청.

붙 임 : 1. 변경(정산) 내역서 1부.

2. 제비율검증표 1부.   끝.