투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(정산) 시행[2018년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기공사(등촌삼거리)-강서]』

『2018년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기공사(등촌삼거리)-강서』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명: 2018년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기공사(등촌삼거리)-강서

2. 공사기간: 2018.12.18. ~ 2019.05.17.

3. 공사위치: 등촌삼거리 교차로

4. 계약업체: 주식회사 다산지앤지 대표 유철종

5. 설계변경내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비고
총공사비		174,596,040	141,678,770	감)32,917,270
도급비	공급가액	117,096,400	104,227,273	감)12,869,127
	부가가치세	11,709,640	10,422,727	감) 1,286,913
	계	128,806,040	114,650,000	감)14,156,040
관급자재비		11,805,900	11,805,990
이 전 비		33,984,010	15,222,780	감)18,761,230

6. 설계변경 사유

가. 계약물량 변경사항(증,감) 반영에 따른 도급비 감액 : 금14,156,040원

나. 보험료 및 산업안전보건관리비 정산

7. 예산과목

가. 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 버스서비스이용제고,

중앙버스전용차로 흐름개선, 시설비 및 부대비, 시설비 : 14,156,040(감액)

붙임  1. 방침서 1부.

2. 설계변경사유서 1부.

3. 설계변경내역서 1부.

4. 보험료 정산 동의서 및 증명서류 1부.

5. 산업안전보건관리비 정산서 및 검토결과서 각 1부.

6. 합의 각서 1부.

7. 검증확인서 1부.  끝.

★주무관	김동기		기전과장	서승완		강서도로사업소장	05/16 代유태용
협조자	관리단속과장	김상두
시행	기전과-4720	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동) 강서도로사업소 기전과	/
전화	02-2657-7969	/전송	02-2657-7939	/		/	부분공개(7)