	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	마곡119안전센터 신축 실정보고 접수 및 검토계획

1. 제이엠건설-제20*******1(2019.5.15.)「실정보고서 제출 건」

2. 마곡119안전센터 신축 건축분야 “실정보고 건” 접수에 따른 설계변경 공사비

증액의 타당성을 다음과 같이 검토하여 원활한 공사를 추진하고자 합니다.

가. 건축개요

1) 건    명: 마곡119안전센터 신축

2) 공사규모: 3층 연면적 880.62㎡

3) 계약금액: ***************

4) 시 공 사: 제이엠건설주식회사(시공사)

나. 실정보고 사항

1) 설계변경 요청내역(세부내역 붙임)                               (단위: 원)

구분	기존(설계)①			변경(업체)②			증감(②-①)
	수량	단가	금액	수량	단가	금액
조립식가설 울타리EGI	**	******	*********	*	*	*	***********
RPP방음벽 5M+1M	*	*	*	**	*******	*********	***********
홍보 디자인 설치	*	*	*	***	******	*********	***********
시스템동바리	***	*******	*******	***	*******	**********	************
SBS앵글	***	**********	************	***	**********	************	***********
SBS앵글	**	**********	***********	**	**********	************	***********
상인방고정철물	***	**********	***********	***	**********	************	*********
방수지 (졸대포함)	***	**********	***********	***	**********	************	*********
SBS 몰탈스크린	***	**********	***********	***	**********	************	*********
레미콘	***		****	***			******
합계			**********			**********	************

2) 설계변경 및 공사비 증액 검토

구 분	실정보고	내역 검토	검토 승인
대 상	제이엠건설	건축사사무소 빅 오피스경건축사사무소	강서소방서
내 용	설계내역상의 물량과 시공물량의 차이가 많음	설계내역 변경 필요 및 공사비 증액 검토	감리업체 협의 검토 후 가용범위 내 인정

다. 조치계획

1) 실정보고 건에 대하여 건축감리와 협의 검토 후 설계변경 인정여부 결정

2) 건축공사 계약 ************ 적용하여 적정 공사비 증액 결정

붙임  1. 실정보고서 공문 1부.

2. 실정보고서 1부.  끝.

담당자	김종돈		장비회계팀장	김동욱		소방행정과장	원병연		소방서장	05/16 김두일
협조자
시행	소방행정과-5494	(		)	접수		(		)
우	07550	강서구 양천로 550(등촌동 강서소방서) 2층 소방행정과	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02)3663-5119	/전송	02)3663-1130	/	201105076@seoul.go.kr	/	부분공개(5)