	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	마곡119안전센터 신축 실정보고 검토 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 제이엠건설-제20*******1(2019.5.15.)「실정보고서 제출 건」과 관련하여      마곡119안전센터 신축 건축분야 설계변경 및 공사비 증액의 타당성 검토를       다음과 같이 요청하오니 검토 후 의견서를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 건축개요

1) 건    명: 마곡119안전센터 신축

2) 공사규모: 3층 연면적 880.62㎡

3) 계약금액: ***************

4) 시 공 사: 제이엠건설주식회사

나. 실정보고 사항

1) 설계변경 요청내역(세부내역 붙임)                               (단위: 원)

구분	기존(설계)①			변경(업체)②			증감(②-①)
	수량	단가	금액	수량	단가	금액
조립식가설 울타리EGI	**	******	*********	*	*	*	***********
RPP방음벽 5M+1M	*	*	*	**	*******	*********	***********
홍보 디자인 설치	*	*	*	***	******	*********	***********
시스템동바리	***	*******	*******	***	*******	**********	************
SBS앵글	***	**********	************	***	**********	************	***********
SBS앵글	**	**********	***********	**	**********	************	***********
상인방고정철물	***	**********	***********	***	**********	************	*********
방수지 (졸대포함)	***	**********	***********	***	**********	************	*********
SBS 몰탈스크린	***	**********	***********	***	**********	************	*********
레미콘	***		****	***			******
합계			**********			**********	************

2) 설계변경 및 공사비 증액 검토

구 분	실정보고	내역 검토	검토 승인
대 상	제이엠건설	건축사사무소 빅 오피스경건축사사무소	강서소방서
내 용	설계내역상의 물량과 시공물량의 차이가 많음	설계내역 변경 필요 및 공사비 증액 검토	감리업체 협의 검토 후 가용범위 내 인정

다. 협조사항: 실정보고 건에 대하여 검토 후 의견서를 제출하여 주시기바랍니다.

붙임  실정보고 공문 각 1부. 끝.

	강서소방서장
수신자	(주)건축사사무소 빅 소장,오피스경건축사사무소 소장
담당자	김종돈		장비회계팀장	김동욱		소방행정과장	05/16 원병연
협조자
시행	소방행정과-5485	(		)	접수		(		)
우	07550	강서구 양천로 550(등촌동 강서소방서) 2층 소방행정과	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02)3663-5119	/전송	02)3663-1130	/	201105076@seoul.go.kr	/	부분공개(5)