등록번호	행정지원국-61		주무관		SMP사업추진반장	행정지원국장
등록일자	2019.5.16.
			이현우		이경숙	전결 05/16 김종석
결재일자	2019.5.16.
공개구분	대시민공개
			협조	기획조정과장			이동성
- 서울메이커스파크 및 복합행정타운 - 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 계획
행정지원국 공간혁신전략기획단(T/F)

「서울메이커스파크 및 복합행정타운」 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 계획

와해되어 가는 중구 도심제조산업의 보존·육성을 위한 허브공간 조성 및 생활밀착형 SOC 재배치를 위한 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역을 추진하고자 함

Ⅰ		추진 배경

□ 도심 제조산업 육성을 위한 산업적, 공간적 새로운 플랫폼 필요

□ 중구는 제조업 사업체수·종사자수가 서울시 1위인 제조산업의 대표 집적지

□ 주변부 개발, 임대료 상승 등 산업환경 악화에 따른 산업 생태계 와해

□ 주민 편의적 쌍방향 행정시스템 구축 필요

□ 구민 밀집거주지역과 상이한 원거리에 행정관청 위치

□ 행정수요를 고려한 생활밀착형SOC 미흡으로 공공의 역할 마련 필요

Ⅱ		추진 계획

□ 용역 개요

□ 과 업 명 : 서울메이커스파크 & 복합행정타운 건립 타당성조사 및 기본계획 수립 용역

□ 용역기간 : 2019. 7. ~ 2020. 2.(착수일로부터 8개월)

□ 용역금액 : 250,000천원(금이억오천만원) ※부가세 포함

□ 용역범위

1) 공간적 범위

- 현황조사 범위 : 세운재정비촉진지구(3,5,6-1,2,3,4구역) 및 인쇄특정개발진흥지구

- 서울메이커스파크 건립 후보지 : 세운재정비촉진지구 중 (6-1,2,3,4구역)

- 복합행정타운 건립 후보지 : 서울 중구 전역

2) 시간적 범위

- 기준연도 : 2019년

- 목표연도 : 2026년(서울메이커스파크 및 복합행정타운 준공 예정)

3) 내용적 범위

- 현황조사 및 여건분석

- 시설별(서울메이커스파크, 복합행정타운) 기본구상

- 시설별 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립

- 사업추진 및 관리·운영 계획 수립

□ 계약방식 : 협상에 의한 계약(제한경쟁입찰)

□ 추진 일정(안)

기 간	내 용	비 고
2019.5.17.(금)	용역 방침 수립
2019.5.21.(화)	협상에의한 계약 검토	구청 재무과
2019.5.23.(목)	계약심사 및 일상감사	구청 감사담당관
2019.5.24.(목)	계약의뢰(기획단→재무과)
2019.5.27.(월)~6.13(목)	입찰공고(15일)	긴급공고로 시행
2019.6.18.(화)	제안서평가위원회
2019.6.20.(목)~6.28(금)	업체 선정
2019.7.9.(화)	착수 보고회	선정으로부터 7일(토,일 제외)
2019. 10월중	중간 보고회	착수로부터 3개월
2020. 2월중	최종 보고회	착수로부터 8개월

Ⅲ		소요예산 및 계약방법

□ 소요예산 : 250,000천원(부가세 포함)

□ 도심형 창조산업, 도심산업 생태계 활성화, 도심형 창조산업 활성화 거점 조성, 연구개발비, 연구용역비

□ 계약방법 : 협상에 의한 계약

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조

Ⅳ		행정사항

□ 계약 검토, 일상감사 및 계약심사 : 재무과, 감사담당관

□ 계약 공고 : 재무과

□ 제안서평가위원회 구성·운영 : 공간혁신전략기획단

□ 계약대상자 선정 : 공간혁신전략기획단

□ 최종 계약대상자와 계약체결 : 재무과

붙임 1. 과업지시서 1부

2. 원가계산서 1부(별도첨부).  끝.