투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약 체결요청(2019년 의정부터 4차 발굴조사 폐기물 처리용역)

조사연구과-668(2019.5.9.)호와 관련하여 『2019년 의정부터 4차 발굴조사 폐기물 처리용역』을 아래와 같이 계약을 변경하고자 합니다.

1. 용  역  명 : 2019년 의정부터 4차 발굴조사 폐기물 처리용역

2. 용역 내용 : 폐기물운반(폐콘크리트 2,100㎥)

폐기물처리(폐콘크리트 2,900ton)

3. 계약 대상 : ㈜삼양이앤디(대표 : 최훈성), ㈜아이케이(대표 : 이상진)

4. 변경 내용 ※ 분담이행률(수집운반 43.4%, 처리 56.6%)에 맞춰 변경

구분		변경 전	변경 후	비고
계약금액		84,033,000원	134,452,800원	50,419,800원 증액
폐기물 수집운반	폐콘크리트	2,100㎥	3,360㎥	1,260㎥ 증가
폐기물 처리	폐콘크리트	2,900ton	4,640ton	1,740ton 증가

5. 변경 사유 :  현장에 적치되어 있는 토사를 처리하기 위하여 계약을 체결하였으나, 2019년 의정부터 4차 발굴조사를 진행하며 발생한 연지내부의 토사가 예상보다 대폭으로 증가하여 물량 및 금액을 변경하여 계약을 하고자 함.

6. 예산 과목 : 도시재생실 광화문광장추진단, 광화문일대 역사성장소성 회복, 광화문일대 활성화, 광화문일대 문화재 발굴조사사업, 일반운영비, 사무관리비(201-01)

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 과업지시서(변경) 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 폐기물 설계변경내역서 1부.  끝.

주무관	조치욱		조사연구과장	05/16 박상빈
협조자	주무관	김영수		총무과장	김춘섭
시행	조사연구과-699	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 종로구 새문안로 55 (신문로2가) 서울역사박물관 조사연구과	/	www.museum.seoul.kr
전화	02)724-0141	/전송	02)724-0206	/	201007312@seoul.go.kr	/	대시민공개