문서번호	정수시설과-2413
결재일자	2019.5.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
노성제		김석정	05/17 김중영
협조
	주무관		김영후

2019년 지역지원(국비보조) 사업

태양광 발전시설 설치 추진 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 5.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2019년 지역지원(국비보조) 사업

태양광 발전시설 설치 추진 계획

2019년 지역지원(국비보조) 사업 예산 재배정에 따라 우리 정수센터 내 건축물 옥상을 활용하여 태양광 발전시설을 설치하고자 추진 계획을 수립하여 보고 드림

□ 관련근거

○ 2019년 공공시설 신재생에너지 보급사업(지역지원) 예산 재배정 및 교부

- 녹색에너지과-11586(2019.5.8.)호

○ 2019년 상수도 신재생에너지 보급 지역지원(국비보조)사업 예정대상 알림

- 기전설비과-7697(2018.10.4.)호

□ 사업개요

○ 사업기간: 2019. 5. ~ 2019. 11.

○ 사업규모: 태양광 발전설비 148kW

○ 사업예산: *************************************

- 예산과목: 에너지절약과 생산으로 원전하나줄이기, 신재생에너지보급, 공공시설 신재생에너지보급-지역지원, 시설비(401-01), 감리비(401-02)

*******************************

○ 대상시설

구 분	건물명	설치가능면적 (㎡)	건축년도	설치용량	비 고
정수장	송수펌프동	780	1992	49kW
	탈수기동	504	1992	32kW
	웰빙동	410	2005	30kW
취수장	염소투입동	426	2003	37kW	수목 음영 발생

- 문제점: 취수장 염소투입동은 수목에 의한 음영 때문에 일조 시간(1일 5시간) 확보 곤란.

- 대  책: 해당 수목은 부지 경계선 내에 있으나 조경 관리 대상이 아니며 오히려 태풍에 의한 전도 피해가 우려되므로 사전에 제거하여 시설물의 안전을 도모함이 타당하다고 사료됨.

- 조치방안: 센터 내 조경관리용역 계약업체에 작업지시하여 제거(또는 가지치기 실시).

○ 설치위치 및 현장사진: 별첨

□ 추진계획

○ 추진순서

구조안전진단 용역 타당성 심사	→	안전진단 용역 시행	→	실시설계 용역 타당성 심사
				↓
태양광 발전설비 구매설치 시행	←	특정제품 선정 심사	←	실시설계 용역 시행
↓
계통 연계 공사 시행	→	준공검사 및 사용전검사	→	태양광 발전 개시

○ 구조 안전진단 용역

- 용역내용: 태양광 발전시설 구조 계산 및 하부 구조물의 구조 안전성 검토

- 용역기간: 계약일로부터 40일

- 소요예산: ********

- 계약방법: ****

· 계약근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 나목

○ 실시설계 용역

- 용역내용: 공사설명서, 자재규격서, 시공도면, 설계계산서, 단가산출서 등 작성

- 용역기간: 계약일로부터 30일

- 소요예산: ********

- 추진방법: 구조 안전진단 후 그 결과를 토대로 실시설계 착수

- 계약방법: ****

· 계약근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 나목

○ 태양광 발전시설 설치공사

- 공사내용: 관급자재(태양광 발전 주요설비) 구매설치 및 발전설비와 기존 전기설비 연계를 위한 전기공사

- 공사기간: 계약일로부터 90일(구매설치 60일, 계통연계공사 30일)

- 추진방법: 실시설계 용역 결과에 따라 발주 방법 결정 후 설치공사 시행

○ 시공감리 용역

- 용역내용: 설계도서 및 설치지침에 따른 시공의 적정성 확인 및 발전시설 설치를 위한 각종 인허가업무 지원

- 용역기간: 공사기간과 동일

- 추진방법: 실시설계 용역 결과에 따라 발주 방법 결정 후 감리용역 시행

□ 추진일정

○ ’19.  5. 31.: 구조 안전진단 용역 타당성 심사 완료

○ ’19.  7. 10.: 안전진단 용역 시행 및 실시설계 용역 타당성 심사 완료

○ ’19.  8. 10.: 실시설계 용역 시행 및 특정제품 선정 심사 후 설치공사 발주

○ ’19. 10. 10.: 태양광 발전설비 제작 및 설치 완료

○ ’19. 11. 10.: 계통 연계(전기 공사) 완료

○ ’19. 11. 20.: 준공검사 및 사용전검사.

붙임  태양광 발전시설 설치 위치도 및 현장 사진 1부.  끝.