문서번호	시설과-3451
결재일자	2019.5.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장	관리부장
김학석	조대복	오임석	05/17 심상원
협 조
	전략기획실장		代임문자
	총무과장		유연호

유인원관  노후설비 개선 공사 관급자재 변경 검토 보고

2019.05.

서울대공원

(시설과)

유인원관 노후설비 개선공사 관급자재 변경 보고

유인원관 노후설비 개선공사 시행중 현장(동물원) 요구사항과 기존 추진계획과 상이한 사항을 반영하고자 관급자재 변경을 추진하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 서울대공원 시설과-5935(2018.09.28.)

서울대공원 동물사 노후 난방시설 개선 계획

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 서울대공원 유인원관 노후설비 개선공사

□ 공사기간 : 2018. 12.04 ~ 2019. 5. 31

□ 시 공 사 : ****************

□ 공사금액 : ************************************************

□ 주요 공사내용

○ 냉·난방시설, 위생시설, 환기시설 개선

○ 자동제어 시설 설치 1식

□ 관급자재 내역: 192,137,490원

○ 기계설비 자동제어 : 136,000,000원

○ 관람실 냉·난방기 : 44,567,980원

○ 공기순환기 이설 :  11,569,510원

Ⅲ		변경내용

□ 주요 변경사항

대상시설	주요공정	변경내용
관람실	***************** ******************** *****************************************	**************************** ********** ****************
유인원사 내실	**************** ********************** ****************	*************************************************** ********************************* **********************
제어설비	*************************** ******************	**************************************** ************************************************

□ 관급자재 변경내용

구 분	당 초	변경	증감액	변경사항
냉·난방기 (EHP)	**********	**********	************	************************** ************************** ********************
공기순환기 이설	**********	*	************	*********************
기타비용 (조달수수료)	*******	*******	********	*******************
합 계	**********	**********	************

※ 제어설비는 증감내역 없음

Ⅳ		보고자 의견 및 예산검토

□ 보고자 의견

○ 공기순환기(3대) 개별 설치공간에 200mm 천공을 6개소로 건물구조에 영향을 미칠수 있어 별도의 방안을 검토하여 조치.

○ 유인원관 내실 4개소(고릴라, 오랑우탄, 침팬지)의 냉방설비 반영 요청(동물복지2과-2321 `19.5.9)에 따라 반영 조치.

○ 자동제어에 냉·난방기와 공기순환기를 시설의 유지관리   편의성 및 효율성 확보를 위해 금번 공사내용에 반영 조치

□ 예산집행계획

○ 기존 냉난방기 물량 변경사항은 공기순환기기 감액비 활용

○ 신규 증가되는 사항은 서울대공원 동물원 국제인증 대비 노후  설비 개선공사 관급자재에 반영 추진

□ 예산과목

○ 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비 및 부대비, 시설비(안전 · 위생시설 취약시설보수비)

Ⅴ		행정사항 및 추진일정

□ 신규 물량 추가 발주

○ 신규 관급자재 : *************

○ 공사 설치부자재(옵션) 증가분 : **********

□ 추진일정

○ 관급자재 추가 및 변경 요청 ------------------‘19. 5.20. 까지

○ 설치시행  ---------------------------------------‘19. 5.30. 까지

○ 공사준공  -------------------------------------- ‘19. 5.31 완료.

붙임 : 1. 유인원관 냉·난방기 견적서. 1부.

2. 유인원관 관람장 냉·난방기 변경 내역서. 1부.

3.  냉방기 설치요청 공문(동물복지2과-2321). 1부.  끝.